함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 및 정산시행 (2014년 강동수도 관내 포장도로굴착복구공사외 1건 건설폐기물철리용역)

우리 사업소에서 시행중인『2014년 강동수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사 외 1건 건설폐기물처리용역)에 대하여 아래와 같이 설계변경 및 정산시행 하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 2014년 강동수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사 외 1건

건설폐기물처리용역

나. 용역개요 : 폐아스콘 2,961톤, 폐콘크리트 460톤, 폐토석 289톤

다. 용역기간 : 2014. 01. 08 ~ 2014. 12. 31

라. 용 역 사 : 태성기초(주)외 1개사, 대표 윤영춘 외 1인

마. 계약금액

구 분	당 초	변 경	증.감
용 역 비	73,478,000원	62,610,000원	감)10,868,000원

바. 설계변경사유 : 공종별 공사물량 증ㆍ감에 따른 물량 조정

사. 예산과목

예 산 과 목	추산금액(원)	추산번호
자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비등(시설비-송배수관)	30,000,000
자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비등(시설비-노후밸브)	3,610,000
상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선교체비(기타교체비-누수복구)	25,000,000
소방재난능력의향상으로안정적인재난시스템구축,소방용수시설보수(시설비-소화전보수)	4,000,000
계	62,610,000

붙  임 : 설계변경 사전심의서 및 설계변경내역서 1부. 끝.

2014.12.10.

추산필

행정지원과

NO–송배수36

노후 56

누수 44

소화전60

주무관	이용호		주무관	김용현		주무관	안남호		급수운영과장	양상윤
강동수도사업소장	12/10 원응연
협조자	★주무관	한호진
시행	급수운영과-19718	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울 강동구 성내로 51 (성내1동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02)3146-5166	/전송	02)3146-5189	/		/	대시민공개