문서번호	설비부-14350
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
이재홍		김창균	12/15 박기형
협조

『관악산 저류조 전기공사』

설계변경(2회) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

도시기반시설본부 설비부

『관악산 저류조 전기공사』

설계변경(2회) 검토 보고

「관악산 저류조 전기공사」 관련, 수방기간 종료에 따른 임시운영설비(분전반, RCS반) 재설치(당초계획) 등에 따른 감리단의 설계변경 보고 사항에 대하여 검토 보고드림.

공사개요

○ 공 사 명 : 관악산 저류조 전기공사

○ 규    모 : 전력수전 및 간선설비, 전등․전열설비, 기타(배관, 배선 등)

저류조 65,000㎥(서울대정문 40,000㎥, 버들골 20,000㎥, 공대폭포 5,000㎥)

○ 공사기간 : 2014. 04. 21 ~ 2015. 05. 30

○ 감 리 사 : ㈜신명건설기술공사

○ 시 공 사 : 에이포유전기(주)

○ 계약금액 : 258백만원

관련근거

○ 설비부-13033(2014.11.20)호 : 실정보고 승인(임시운영설비 이설)

○ 도림천(감) 2014-315(2014.12.12)호 : 실정보고(설계변경)

주요 변경내용

구 분	주요 변경내용	비고
버들골 공대폭포	수방기간 종료에 따른 분전반 재설치에 따른 시공 물량 정산
공통	비상 시 수동조작 및 유지관리를 위하여 보안등 설치

설계변경 금액

○ 변경금액

구 분	당초	변경	증 감
공 사 비(원)	258,819,000	281,028,000	증 22,209,000

※ 공사비 증액분(22,209,000원)은 예산집행잔액 사용

○ 공종별 변경금액

구 분	공종	당초	변경	증 감
서울대정문	전기설비	76,394,271	76,394,271	0
	분전반이설	-	-	0
	보안등설치(1등)	-	655,148	증 655,148
버들골 (노천강당)	전기설비	58,594,146	58,594,146	0
	분전반이설	-	4,029,032	증 4,029,032
	보안등설치(3등)	-	1,965,568	증 1,965,568
공대폭포	전기설비	22,352,284	22,352,284	0
	분전반이설	-	6,041,465	증 6,041,465
	보안등설치(2등)	-	1,310,378	증 1,310,378
계		157,340,701	171,342,292	증 14,001,591
제경비	부가세포함	101,478,299	109,685,708	증 8,207,409
합 계		258,819,000	281,028,000	증 22,209,000

○ 예산집행현황(단위 : 원)

예산액	원인행위액(집행금액)	집행잔액	비고
1,470,000,000	1,429,233,349	40,766,651

※ 하천관리과, 치수 및 하천관리, 수방대책사업, 관악산 저류조 설치, 시설비

보고자 의견

○ 제비율 검증결과 제경비 중 이윤 초과부분 수정과 감리원의 실정보고(설계       변경) 사항을 승인하고

○ 계약부서에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임 : 1. 검토의견서(감리) 및 설계변경(2회)도서 각 1부.

2. 제비율검증표 변경전 및 변경후 각 1부.  끝.