문서번호	건축부-15220
결재일자	2014.12.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
지방시설사무관대우		환경시설과장	건축부장
윤승근		代차무흥	12/22 김우성
협조

서울과학관 건립공사

실정보고(1차 공사기간 연장) 검토

2014. 12.

도시기반시설본부

(건축부)

서울과학관 건립공사

실정보고(1차 공사기간 연장) 검토

서울과학관 건립공사와 관련, 1차 공사의 계약기간 연장 요청에 대한 책임감리원의 실정보고 검토 및 조치계획임.

1		관련근거

□ 정과감 제14-248(2014.12.18.)호

- 공사기간 연장에 대한 실정보고 및 연기요청

2		공사개요

□ 공 사 명 : 서울과학관 건립공사

□ 대지위치 : 노원구 한글비석로 168(하계동 산11) 일대

□ 규    모 : 지하1층 지상3층, 연면적 12,330㎡

□ 공사기간 : 2014.01.13.~2016.01.12.(24개월)

(1차 : 2014.01.13.~2014.12.25.)

□ 도급금액 : 9,977,692천원 (1차 : 2,541,000천원)

※ 설계변경계약 예정금액 : 10,241,362,610원 (건축부-14363(2014.12.01.)호 관련)

□ 시공자 : 키움건설(주) 외2

□ 감리자 : ㈜정림건축종합건축사사무소 외2

3		실정보고 내용

□ 시공사의 공기연장 요구내용

구분	공기연장 요구		사유	비고
	당초	변경
서울과학관 건립공사(1차)	~ ‘14.12.25.	~ ‘15.02.10. (47일 연장)	기계실 암반으로 공기과다 소요 등

□ 책임감리원 검토의견

○ 시공자의 1차 공사 공기연장 요구는 계약기간 연장사유에 해당하나, 연장요구일 47일은 37일로 조정함이 적정함.

○ 아울러, 연장 공사기간은 총 공사기간 내에 만회토록 우선 노력

○ 항목별 공기연장 조정내용

구분	공기연장 일수		조정사유	비고
	요구	조정
차수조정에 의한 골조공사 증가에 따라 절대공기 추가	30	30	적정
폭설 및 한파의 의한 작업불가	6	6	적정
기계실, 집수정 및 주차장램프 암발생으로 터파기공사 지연	11	1	적정
계	47	37

4		처리방안 및 계획

□ 책임감리원의 검토의견이 시공사의 연장요구일 47일을 37일로 조정하여 보고한 바 실정보고를 승인하고, 계약부서에 공기연장 변경 계약을 요청하고 사업주관부서에 이를 알리고자 함.

□ 공사기간 변경 승인 및 계약요쳥 내용

구분	공사기간 연장		공기연장 귀책기관	비고
	당초	변경
서울과학관 건립공사(1차)	‘14.01.13. ~ ‘14.12.25.	‘14.01.13. ~ ‘15.01.31. (37일 연장)	도시기반시설본부

붙임 : 책임감리원 실정보고(정과감 제14-248호) 1부. 끝.