문서번호	기전과-9074
결재일자	2014.12.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	기전과장
차준원	채희준	12/31 최주용

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

변경 승인 요청에 따른 검토 보고(용두4구역-신호)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

성동도로사업소

(기 전 과)

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

변경승인에 따른 검토 보고

교통안전시설물 원인자 부담공사 변경승인 요청이 있어 관련서류 및 현장 확인후 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

용두제4구역 주택재개발정비사업조합 용두4 제2014-110호(2014.12.24.)

㈜영호이앤씨 영원 14-12-04호(2014.12.17.)

�

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 용두제4구역 주택재개발 정비사업 교통안전시설물 설치공사(신호)

공사구간 : 용두 제4구역 주택재개발 정비사업 현장

공사기간 : 2014.10.30 ~ 2015.02.25

공사기간 및 공사참여자

구분	공사참여자			원인자
	시공사	감리사	설계사
신호	㈜신흥이앤지	서울시강북감리	㈜건영이앤씨	용두제4구역 주택재개발정비 사업조합

Ⅲ		변경요청 및 실정보고 검토결과

위치(교차로명)	현황 및 문제점	변경요청의견	검토결과
용두사가리 주변	일부 구간 지중화 불가하여 가공선로 시공	가공지주 150∅ 2본→200∅ 2본 교체	지중화 불가로 인한 가공선로 설치시 선로증가로 가공지주를 교체 함이 타당함.
	경보등 구간 선로 유지보수	선로 유지보수 관계로 맨홀 추가설치	경보등 유지보수를 위하여 맨홀 신설 함이 타당함

붙    임 : 1. 원인자부담공사 준공 변경승인 요청 및 실정보고 1부. 끝.