보  고  서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	손현정	김기상	12/31 장시명

제 목 : 급수공사 연기 보고

=============================================================

명에 의하여  급수공사 업무수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

▢ 현 황

연번	위 치	공사개요	작업지시 번호	비 고
1	***************	D=30mm, L=4m 부설	신설-201번

▢ 보고 내용

○ 상기 신축건물 급수공사 관련 작업지시를 하였으나, 동절기 건축공정이 지연되고

공사현장에 자재적치 등 수요가가 급수공사 연기원을 제출하여 불가피하게 급수

공사를 연기하여야할 실정임

▢ 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 조치 의견

○ 위와 같은 실정으로 아래와 같이 공사기간을 연기하여 신축건물 급수공사 시행에 만전을 기하고자 합니다.

작업지시 번호	당초 작업기간	변경 작업기간	비 고
신설-201	’14.12.09 ~ 12.26	’14.12.09 ~ ’15.01.10

붙임 : 상수도공사 연기원 1부.(별도첨부)  끝.