투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 책임감리원
(경유)
제목	업무지시전(1월 휴일 및 연장작업계획 승인)

1.업무지시현장 :  서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 (주)도화엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2014-12-31 00:12:00

3.지 시 내 용 : 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업과 관련 2015년 1월 휴일 및 연장작업계획을 승인하오니 안전ㆍ품질관리에 만전을 기하여 주시기 바라며, 안전관련 20대 중점항목 준수 및 무리한 작업진행으로 안전사고가 발생하지 않도록 현장관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

작업일	작업내용	휴일작업 사유	감리대가
1월 03일 (토)	1) PHC파일 천공 및 항타 2) 철근조립 및 거푸집설치 3) 소화조구간 가시설 등	예정공정으로 진행	대체휴무
1월 10일 (토)
1월 17일 (토)
1월 24일 (토)
1월 31일 (토)
1월 04일 (일)		구조물공사의 연속적인 작업과 동절기 작업효율 저하에 따른 구조물공사의 목표공정율 확보	시공사
1월 18일 (일)
3일∼30일 (18:00~20:00)

끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
주무관							김상용			방재시설과장					서관석					방재시설부장					12/31 임춘근
협조자
시행			방재시설부-14134									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층															/
전화		02)3708-8782						/전송			02)3708-8756					/	kimsy2405@seoul.go.kr												/	대시민공개