투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기 - 양화 한강공원 친수공간 조성공사

1. 생태공원과-3051(2014.12.29.)호 관련입니다.

2. 위 관련으로 생태공원과에서 추진 중인『양화한강공원 친수공간 조성공사』에 소요되는 관급자재(목재데크)에 대하여 아래와 같이 납품기한 변경 처리 하고자 합니다

1. 건   명 : 양화한강공원 친수공간 조성공사 관급자재 조달구매

2. 납품기한 연기요청 현황

납 품 요구번호	품 명	규 격	수 량	납 품 기 한		비 고
				당 초	변 경
12-14-1- 46846-00	데크재	목재데크재 1800×115×t25㎜, 이페	687㎡	2014.12.28	2015.1.9	주식회사 대라

3. 연기사유 : 공사기한 연기(2차분 준공기한 : ’15.4.15)

붙임 변경요청서 1부.  끝.

주무관	이규옥		총무과장	12/31 최대봉
협조자
시행	총무과-20092	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0713	/전송	02-3780-0740	/	santamam@seoul.go.kr	/	대시민공개