문서번호	고도정수반-6720
결재일자	2014.12.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		고도정수반장	시설안전부장
라승보		남정열	12/31 이규상
협 조
	주무관			이재학

『구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사』

2014 세출예산 이월계획 보고

2014. 12.

시설안전부

(고도정수반)

『구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사』

2014 세출예산 이월계획 보고

당 공사 및 건설사업관리용역, 폐기물처리용역 준공기한 연기와 관련 일부예산을 이월하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

사업개요

○ 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

- 사업개요 : 재건설(표준정수) 25만톤/일, 고도정수처리시설 45만톤/일

(※ 총 시설용량 50만톤/일)

- 공 사 비 : 179,409백만원(6차분 : 51,949백만원)

- 공사기간 : ’09.11.23.  ～  ’15. 4.20.(6차분 : ’14.1. 8.  ～  ’15. 4.20.)

- 시 공 사 : ㈜대우건설 외 2개사

○ 구의정수센터 고도정수처리시설 및 재건설공사 건설사업관리용역

- 도 급 비 : 5,160백만원(7차분 : 1,205백만원)

- 용역기간 : ’09. 4.23.  ～  ’15. 4.30.(7차분 : ’14. 1. 2.  ～  ’15. 4.30.)

- 용 역 사 : ㈜한국종합기술 외 1개사

○ 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 건설폐기물 처리용역(추가발주)

- 도 급 비 : 655백만원(3차분 : 372백만원)

- 용역기간 : ’12. 4.10.  ～  ’15. 4.30.(3차분 : ’14. 2. 4.  ～  ’15. 4.30.)

- 용 역 사 : 대길환경(주)

사업별 이월액 현황                                   (단위:천원)

사업구분	지출원인행위액	지출액	이월액	비고
계	33,098,241	28,228,457	4,876,784
공사(시설비)	31,922,000	27,396,623	4,525,377
폐기물(시설비)	372,456	205,834	166,622
건설사업관리(감리비)	803,785	626,000	177,785
기타(시설부대비)	-	-	7,000

이월액 발생 사유

○ 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 6차분 (시설비)

- 추가공사 시행에 따른 공사비 증액 및 공사기간 연장

▶ 추가공사

‧ 대현산배수지 송수관 비상관로(이중화) 부설 : D1200~1350mm, L=298m

‧ 양진초‧중학교 진입도로 월편 울타리(휀스) 이전설치 : L=180m, H=3m

- 공사비 변경 : 50,911,687천원 → 51,948,687천원(증 1,037,000천원)

- 공사기간 변경 : 2014.1.8.～2014.12.20. → ～ 2015. 4.20.

○ 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 건설폐기물처리용역 3차(시설비)

- 공사기간 연장에 따른 용역기간 연장

- 용역비 변경 : 변경없음(372,456천원)

- 용역기간 변경 : 2014.2.4.～2014.12.20. → ～ 2015. 4.20

○ 구의정수센터 고도정수처리시설 및 재건설공사 건설사업관리용역 7차분(감리비)

- 공사기간 연장에 따른 용역비 변경 및 용역기간 연장

- 용역비 변경 : 1,027,000천원 → 1,204,785천원(증 177,785천원)

- 용역기간 변경 : 2014.1.2. ～ 2014.12.18. → ～ 2015. 4.30

○ 기타(시설부대비)

- 당 공사 관련 자문회의 개최 대비 외부전문가 자문비용 확보

- 공사 준공 및 준공식 행사 관련 소요경비 확보

행정사항

○ 사업관리에 차질이 발생치 않도록 이월 대상액을 2015년으로 이월조치코자 함.

붙임 : 1. 공사연기 방침서 1부

2. 공기연장에 따른 사업비 조정 검토서 1부

3. 이월사업별 명세서 1부

4. 이월사업 명세표 1부. 끝.