문서번호	배수과-8467
결재일자	2014.12.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	배수과장	급수부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
신근호	이임섭	이상홍	정득모		12/31 남원준
협 조
	경영관리부장			정진일
	기획예산과장			최생인

2015년도

노후 송,배수관 정비사업 계획

2014. 12.

상수도사업본부

(급수부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2015년도

노후 송∙배수관 정비사업 계획

깨끗하고 안전한 수돗물 공급을 위해 내부라이닝이 되어있지 않은 회주철관과 유해성 논란이 되고 있는 콜타르에나멜 코팅 강관 중 누수 및 수질사고 발생이 우려되는 노후관을 우선 정비하고자 ’15년 노후 송∙배수관정비 사업계획을 수립 추진하여 믿고 마실수 있는 수돗물 공급을 하고자 함

Ⅰ. 사업 및 예산현황

구 분	총 계	기투자 (’84~’14년)	2015년	2016년 이후
연장(km)	624	576	18	30
사업비(억원)	9,406	8,400	376	630

Ⅱ. ’15년 예산 집행계획

□ 총 예 산 : 37,600백만원

□ 집행계획

○ 회주철관 및 콜타르에나멜 강관 정비 -------- 33,200백만원

○ 중랑천 횡단(D=1,350mm) --------------- 2,000백만원

○ 감리비 --------------------------------------- 110백만원

○ 공기관 등에 대한 대행사업비 ------------------ 940백만원

○ 본부(포괄비) ------------------------------- 1,350백만원

총  계  ---------------------------------- 37,600백만원

1 -

Ⅲ. ’15년 사업 심사

□ 심사 및 사업 대상

○ 노후된 강관, 회주철관 중 400mm이상으로써 누수사고가 많은 관로

○ ’84년까지 부설한 강관중 유해성 논란이 되고 있는 콜타르에나멜로 내부코팅이 되어있는 관

○ 뚝도정수장 비상급수와 관련 강북(월곡)→뚝도(대현산)으로 급수 지원을 위한 청계천 횡단 노후관

○ 고도정수시설 통수와 관련 구의↔뚝도 정수장간 비상급수를 위한 노후관 및 하천부위 노출 상수도관 정비

□ 심사결과

○ 사업소 요청 : 58건 137,177백만원

○ 선정결과 : 26건 37,600백만원

□ 사업소별 현황

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시설 안전부 중랑천 횡단관로 이설공사(D=1,350mm), 본부(시설안전부) 장기계속공사 시행	기타 감리비 1,050백만원, 예비비 1,350백만원
건 수	26	3	3	5	3	2	2	3	4	1	-
연 장 (km)	18	3.10	2.15	2.67	1.75	1.37	1.20	3.06	2.60	0.1	-
예산액 (백만원)	37,600	5,100	3,100	7,000	2,700	2,400	3,000	3,700	6,200	2,000	2,400

2 -

Ⅳ. 추진일정

□ 현장조사 설계 : ’15. 1. ~ 3.

□ 계약심사 및 발주 : ’15. 3. ~ 4.

□ 계약 및 착공 : ’15. 4. ~ 5.

※ 따로붙임 : 1) 2015년 송∙배수관정비 사업 검토(총괄) 1부.

2) 2015년 송∙배수관정비 사업 검토결과 1부.  끝.

3 -