함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	기획예산과장
(경유)
제목	2014 회계연도 세출예산 이월 대상사업 제출

1. 기획예산과-9622(2014.12.12.) 2014회계연도 세출예산 이월 대상사업 제출과 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 2014 회계연도 세출예산 이월 대상업을 아래와 같이 제출하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 사고이월 대상사업

(금액 : 천원)

사업명	지출원인 행위액	지출액	사 고 이월액	사유
암사정수센터 고도정수처리시설공사 (약품주입설비 제작구매설치)	475,417	235,000	236,718	겨울철 저수온기(1월) 충분한 시험운전을 실시하여 운전자료 확보
암사정수센터 고도정수처리시설공사 (암사정수센터 약품주입설비 전기공사	54,897	-	54,897	선행공사 저수온기에 시험운전 실시로 사고이월

붙   임 : 1. 이월사업별 명세서 각1부.

2. 이월사업 명세표 1부.

3. 약품주입설비 관련 공사 계약서 각1부.

4. 약품주입설비 제작구매설치 지출결의서 1부.

5. 약품주입설비 제작구매설치 공사연장 합의서 1부.

6. 공사기간 연장 및 사고이월 방침서 1부.  끝.

	생산부장
주무관	유통희		기전설비과장	서대훈		생산부장	01/02 박용철
협조자	주무관	서기종		주무관	오환석
시행	기전설비과-8710	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27-1	/
전화	02)3146-1333	/전송	02)3146-1319	/	1wls2wls@seoul.go.kr	/	대시민공개