투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시인재개발원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 보고(공사, 배움관 중정계단 이미지 설치공사-기간연장)

1. 인재기획과 – 16416(2014.12.29.)호 관련입니다.

2. 배움관 중정계단 이미지 설치공사 계약건에 대해 다음과 같이 변경계약을 체결하였음을 보고합니다.

가. 건　명 : 배움관 중정계단 이미지 설치공사 변경계약

나. 계약업체 : ******************)

-  **************************

다. 변경내역

구분	당초	변경후	비고
계약금액	8,740,000원	8,740,000원	변동없음
계약기간	‘14.12.17.~12.26	‘14.12.17.~’15.1.31	(36일 연장)

라. 변경사유 : 기상악화로 외부 작업이 불가하여 기간연장함

마, 지체상금 : 없음

붙임 : 변경계약통보서 1부.  끝.

주무관	백일선		시설재무팀장	김종엽		인재기획과장	01/02 박기용
협조자
시행	인재기획과-44	(		)	접수		(		)
우	137-070	서울 서초구 남부순환로 340길 57(서초동)	/	http://hrd.seoul.go.kr
전화	02 3488-2055	/전송	02 3488-2346	/	dshy@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)