	서울특별시체육시설관리사업소
수신자	운영기획과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 요청

1. 시설개선과-23(2015.01.02.)호와 관련입니다.

2. 현재 시행 중인 「서울종합운동장 남문주변 환경개선사업 폐기물처리용역」의 준공기한을 다음과 같이 연장코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사업개요

․ 용 역 명 : 서울종합운동장 남문주변 환경개선사업 폐기물처리용역

․ 계 약 자 : 협신자원(주) 대표 오원석

․ 계약금액 : 15,631,000원

․ 공사기간 : 2014.12.01.~2015.01.19.

나. 준공기한 연기내용

․ (당초) 2015.01.19. → (변경) 2015.03.31.

다. 연기사유 : 본 공사 연기에 따른 준공기한 연기

라. 귀    책 : 체육시설관리사업소

첨부 : 준공기한 연기 보고서 1부. 끝.

	시설개선과장
주무관	안봉환		주무관	이영교		시설개선과장	01/02 신동호
협조자	주무관	권수식
시행	시설개선과-30	(		)	접수		(		)
우	138-934	서울특별시 송파구 올림픽로 25 서울종합운동장	/
전화	02-2240-8790	/전송	02-2240-8777	/	bongbong73@seoul.go.kr	/	대시민공개