투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	9호선2단계 기계설비분야 6차 공정회의 결과 통보

1. 도시철도 설비부-12134(2014. 12. 31)호와 관련입니다.

2. 9호선2단계 기계설비분야 공정회의 시 건축분야에 대해 아래와 같이 협조 요청이 있어 통보하오니 조속 조치바랍니다.

가. 협조사항

○ 915공구

- 공조기계실 출입문(시건장치) 설치지연으로 공정관리 곤란

- 공조기계실내 각종자재 및 쓰레기 이동 조치

- 926정거장 대합실 및 승강장 건축 마감 조치

○ 916공구

- 정거장대합실 바닥 및 천장마감 조속 조치

○ 917공구

- 환승통로 외부출입구 E/V철골구조물 조속 설치.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	9호선 2단계 915공구 책임감리원,9호선 2단계 916공구 책임감리원,9호선 2단계 917공구 책임감리원
주무관	정현배		건축공사과장	김내환		도시철도건축부장	01/05 이병석
협조자
시행	도시철도건축부-45	(		)	접수		(		)
우	100-170	서울 중구 청계천로 8 도시철도건축부	/	infra.seoul.go.lkr
전화	02)772-7341	/전송	02)772-7309	/		/	대시민공개