문서번호	시설관리과-233
결재일자	2015.1.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이생기	최명익	01/05 나태산

교통처리 용역 추진 계획 (종로구청~탑골공원외 2건)

2015.01

중부수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

송배수관 부설공사에 따른 교통처리용역 추진계획

종로구 관내 2015년도 송배수관정비공사 시행건에 대하여 교통처리 용역을 추진하여, 도로 점용 공사로 인한 시민불편을 최소화 하고자 합니다

※ 관련공문 : 배수과-7385(2013.12.26.)

1. 개 요

가. 용역명 : 종로구청~탑골공원 송배수관부설공사외 2건 교통소통 대책

나. 용역대상 개요

공사명	사업개요	도로명	도로 점용기간	비고
소계	D=400~600,L=2050m		80일
종로구청~탑골공원외 1건 송배수관부설공사	D=500~600, L=950m	종로, 율곡로	40일
청계2가교차로~청계5가 교차로 송배수관정비공사	D=400, L=1100m	청계천	40일

다. 용 역 비 : 27,148,000원

라. 용역기간 : 착공일로부터 60일간

마. 용역개요 : 상수도관 매설을 위한 이동식도로 점용 2,050m

2. 추진계획

가. 용역추진계획 방침 → 기술 용역 타당성 심사요청(시청 기술심사담당관)         → 용역발주 → 계약 → 교통소통대책심의회 심의 → 승인통보 → 공사착공

3. 용역내용

가. 용역목적 : 공사 중 교통대책의 질적향상을 도모하고, 도로점용 공사로 인한                   시민불편 최소화

나.추진근거 : 서울특별시 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례 제3조                     적용대상 3호

다. 과업범위 : 종로(900m),율곡로(50m) 및 청계천(1100m) 상수도관 매설을

위한 이동식 도로 점용

라. 주요과업 내용

- 교통소통대책 계획 요약서

- 사업지 주변 교통시설 설치계획 및 교통관련 계획

- 교통현황 및 분석

- 공사로 인한 교통영향 분석

마. 용역대가 산출근거

- 실비정액가산방식 : 교통관련계획 표준품셈(한국교통기술사협회 2012년)에          의해 산출된 투입인원에 대하여 적정 인원으로 투입비율 조정

4. 향후 추진계획

가. 2015.1.05. : 교통처리 용역타당성 심사요청(사업소→시청기술심사담당관)

나. 2015.1.12. : 심사결과에 의거 용역발주

다. 2015.1.26. : 용역착수(착공일로부터 60일)

첨부 : 1) 기술용역사업계획서 1부.

2) 설계서 1부.  끝.