투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	2014 여의도샛강외 1개소 전기안전관리대행 용역 설계변경 시행에 따른 계약변경 의뢰

1. 기전설비1과-18(2015. 1. 2)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 『2014 여의도샛강외 1개소 전기안전관리대행 용역』에 대하여 아래와 같이 계약변경 사항이 있어 설계변경을 시행코자 하오니 변경계약하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 2014 여의도샛강 펌프장외 1개소 전기안전관리 대행용역

나. 용역기간 : 2014. 3. 1. ~ 2015. 2. 28.

다. 계약업체 : ***************

라. 대상시설 : 여의도샛강 펌프장 및 난지 강변물놀이장 전기설비

마. 변경사유 : 강변물놀이장 계약전력 해지에 따른 전기안전관리자 해임으로 감액 발생

바. 설계변경 내용 : 1,730,000원 → 1,557,000원

구 분		변경 전	변경 후	비 고
여의도 샛강	계약기간	`14.3.1~`15.2.28	`14.3.1~`15.2.28	변경사항 없음
	계약금액	1,038,000	1,038,000
난지 강변 물놀이장	계약기간	`14.3.1~`15.2.28 (4개월 물놀이장 용역업체 납부)	`14.3.1~`14.12.31	2개월 단축 173,000원 감액
	계약금액	692,000	519,000

붙임. 1. 2014 여의도샛강 펌프장외 1개소 전기안전관리대행 용역 설계변경 보고 1부

2. 2014 여의도샛강 펌프장외 1개소 전기안전관리대행 용역 보고 1부

3. 용역체결통보서 1부.

4. 용역변경 내역서 1부. 끝.

	기전설비1과장
주무관	이학수		기전설비1과장	01/05 김남수
협조자
시행	기전설비1과-36	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개