투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고에 대한 재검토 지시)

1.업무지시현장 :  구리암사대교 건설공사 현대건설 주식회사, 구리암사대교 건설공사 (주)도화엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2015-01-05 00:01:00

3.지 시 내 용:

1. 암사감리2014-917호(2014.12.29.)와 관련입니다.

2, 위 대호로 실정보고하신 암사IC 램프-E(P3) 구간의 횡방향 점검통로는 단순 수량 증감으로 판단되어 당초 계약단가에 수량 증가로 설계변경 될수 있도록 재검토 반영하시기 바랍니다. 끝.

끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							조양연			광역도로과장					전결 01/05 최광무
협조자
시행			토목부-121									(						)		접수											(						)
우	100-777					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		0237082557						/전송			0237082599					/	choaral@seoul.go.kr												/	대시민공개