내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	`14년 운현궁 정밀실측용역의 과업기간과 참여기술자 변경 요청

1. 시 역사문화재과-146(2015.01.05.) 관련입니다.

2. 2014년 운현궁 정밀실측조서 및 보고서 발간용역사업의 참여기술자 변경과 과업기간 연장을 아래와 같이 시행하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약내용

○ 사 업 명 : 운현궁 정밀실측조사 및 보고서 발간 용역

○ 사 업 비 : 금277,035,000원

○ 사업기간 : `14.08.14. ~ `15.02.16.

○ 계약업체 : (주)볕터건축사사무소(대표:황진하)

나. 변경내용

구분	당초	변경	변경사유
계약기간	2014.08.14 ~ 2015.02.16	2014.08.14 ~ 2015.04.10.(53일 증)	용역사에서 제안한 실측홍보 동영상 제작(2분)과 운현궁 경계담당 3D 모델링 작업추가가 용역결과물 품질제고에 기여한다는 자문의견(김주연교수 외 3인)에 따라 참여기술자 변경과 과업기간 연장을 승인.
참여인력 (BIM 부문)	박기호 외 5인	이상훈 외 5인
추가업무	-	경계담당 및 홍보 동영상 제작(2분)
사업금액	금액변경 없음.

붙임  1. 용역 변경계획(내부) 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

	역사문화재과장
주무관	김동천		문화재보존팀장	이은주		역사문화재과장	01/05 황요한
협조자
시행	역사문화재과-147	(		)	접수		(		)
우	100-813	서울 중구 서소문로37 서울별관(서소문청사) 1동 5층	/
전화	02-2133-2624	/전송	02-768-8873	/	kdc.korea@seoul.go.kr	/	대시민공개