투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	토목부장
(경유)
제목	제15차 설계변경 자문회의(소위원회) 지적사항 조치결과 제출

1. 토목부-25521(2014.12.23.)호와 관련입니다.

2. 2014.12.16(화) 14:00 개최한 설계변경 자문회의(소위원회) 제15차

지적사항(잠원2빗물펌프장신설공사)에 대한 조치결과를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 설계변경 자문회의 조치결과

자문건명	지적사항	조치결과	요구액 (천원)	절감액 (천원)	증감사유
					주요공정	사유
RPP 가설 방음벽 변경	자재단가를 조달청 단가와 비교 검토 반영 외 3건	검토의견반영 (별첨참조)	125,865	1,865	가설방음벽	단가 수정
공기연장 간접비	고용보험료 이중 적용 재검토	검토의견반영 (별첨참조)	298,848	1,639	간접노무비	고용 보험료 공제
계				3,504

첨부 : 1. 설계변경 자문회의 지적사항 조치결과 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	이병환		치수시설과장	김흥근		방재시설부장	01/05 임춘근
협조자
시행	방재시설부-107	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 2층	/
전화	02-3708-8773	/전송	02-3708-8756	/	bhl923@seoul.go.kr	/	대시민공개