투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 계약물량 변경(선사로~고덕지구간 도로확장공사 6차)

1. 선사로~고덕지구간 도로확장공사(6차)에 소요되는 관급자재(콘크리트블록)에 대하여 아래와 같이 계약물량 및 계약기간을 변경 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

아   래   -

가. 계약물량 변경내역

구분	품 목	규 격	단위	수 량 및 납품기한 변경			계약자
				당 초	변 경	증 · 감
자재	콘크리트블록	에코테라블록, 60t,투수	㎡	2,124	699.47	감)1,424.5	㈜아트캠
		에코테라블록, 80t,투수	㎡	646	643.16	감) 2.84	“

나. 계약기간 연장 : 증 1개월

○ 당 초 : 2014.12.31.

○ 변 경 : 2015. 1.31.

붙  임 : 관급자재 계약물량변경 세부내역 1부.  끝.

	토목부장
주무관	이한규		광역도로과장	최광무		토목부장	01/06 노우성
협조자
시행	토목부-185	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개