투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	납품기한(자연경계석) 연장 의뢰

슬러지재활용과-7495(‘14.12.08)호 “관급자재구매(분뇨 유입저류조 증설공사-자연경계석) ”과 관련하여 납품기한의 연장을 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 대상물품 : 자연경계석

나. 사    유 : 사용시기 미도래

다. 납품기한

• 변경전 :  ‘15.01.08

• 변경후 :  ‘15.05.31

라. 계약업체 : ㈜대호석재 (대표 서재필). 끝.

	슬러지재활용과장
지방환경사무관대우	하병문		슬러지재활용과장	01/06 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-97	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 차장터 5길(송정동 73)	/
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	hbm4146@seoul.go.kr	/	대시민공개