투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	물재생과장
(경유)
제 목	(증액,납기)변경계약 체결 통지-2014 중랑물재생센터 차집관거 준설토 운반 및 처리용역

물재생과-7557(2014.12.24.)호와 관련하여 아래와 같이 변경계약 체결하였음을 통지합니다.

가. 계약건명 : 2014 중랑물재생센터 차집관거 준설토 운반 및 처리용역

나. 계약금액 : 증 금50,580,100원(금오천오십팔만일백원)

- 변 경 : 금170,874,000원(금일억칠천팔십칠만사천원)

- 당 초 : 금120,293,900원(금일억이천이십구만삼천구백원)

다. 계 약 일 : 2014년  06월  20일 (변경계약일 : 2014년 12월 31일)

라. 착 수 일 : 2014년  06월  20일

마. 완수기한 : 58일 연장

- 변 경 : 2015년  02월  27일

- 당 초 : 2014년  12월  31일

바. 변경사유 : 준설공사 공기 연장에 따른 준설토 발생량 증감 반영

사. 계약업체 : ㈜이오개발 (대표 이은숙) (☎ 031-611-6811)

붙임  1. 변경계약서 1부.

2. 변경내역서 1부.  끝.

	관리과장
주무관	정은경		관리과장	01/06 김홍덕
협조자
시행	관리과-182	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장3길 64(용답동,중랑물재생센터)	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2522	/전송	02-2211-2529	/	pandw1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)