문서번호	시설과-119
결재일자	2015.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	시설팀장	시설과장		중부공원녹지사업소장
서민수	代서민수	함석주		01/06 이용태
협 조

- 장충리틀야구장 펜스 보호패드 구매 설치 -

납품기한 연기 검토 보고

2015. 1. 6.

중부공원녹지사업소

(시 설 과)

- 장충리틀야구장 펜스 보호패드 구매 설치 -

납품기한 연기 검토 보고

『장충리틀야구장 펜스 보호패드 구매 설치』와 관련하여 납품기한을 아래와 같이 연기 하고자 보고 드림.

Ⅰ		사업개요

❍ 계 약 명 : 장충리틀야구장 펜스 보호패드 구매 설치

❍ 계약금액 : 138,900,000원

❍ 계약업체 : ㈜스페이스엔지니어링 대표 송재호

❍ 계약일자 : 2014. 11. 18.

❍ 납품기한 : 2015. 01. 17.

Ⅱ		납품기한 연기 검토

❍ 납품기한 연기 기한

- 당초 : 2014. 11. 18~ 2015. 01. 17.

- 변경 : 2014. 11. 18~ 2015. 02. 23.(37일 연기)

❍ 연기사유

- 장충리틀야구장의 펜스 보호패드의 브라켙(지지대)인 ‘Z 클립’을 녹이나지 않는 알루미늄재질로 시공하여 줄 것을 한국리틀야구연맹에서 요구함에 따라, 신규 제작에 시일이 필요함.

❍ 지체상금 부과여부

- 연기사유 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅲ		보고자 의견

❍ 위와 같이 납품기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 사본 1부.

2. 납품기한 연기 의뢰서 1부. 끝.