문서번호	시설관리과-108
결재일자	2015.1.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	시설관리과장	시설안전부장
박장진	한명석	01/07 강신재

상수도공사(시설물 설치 및 보수) 건설사업관리용역

건설사업관리기술자 동절기(1~2월) 운영계획 보고

]

2014. 12.

상수도사업본부

(시설관리과)

상수도공사(시설물 설치 및 보수) 건설사업관리용역

건설사업관리기술자 동절기(1~2월) 운영계획 보고

우리 본부에서 추진하고 있는 『상수도공사(시설물 설치 및 보수) 건설사업관리용역』 건설사업관리기술자 동절기(1~2월)운영계획에 대하여 보고 드림.

□ 용역현황

❍ 용 역 명 : 상수도공사(시설물 설치 및 보수) 건설사업관리용역

❍ 용역업체 : ㈜이준엔지니어링외 2개사

❍ 용역기간 : ‘14. 10. 28. ~ ’15. 5. 24.

❍ 용역금액 : 898,282,000원

□ 건설사업관리기술자 투입현황

❍ 투입인원 및 시기

연도별	기 간	참여 기술자 투입인원
2014	○ 12월 1일 ～ 12월 19일	○ 현행 근무인원 (15명)
	○ 12월 20일 ～ 12월 31일	○ 9명 근무 (사업소별 1명, 6명 감 조정)
2015	○ 1월 1일 ～ 2월 28일	○ 3명 근무 〔책임 1명, 분야별 2명(강남, 강북)〕
	○ 3월 1일 ～ 5월 24일	○ 현행 근무인원 (15명)

※ 관련근거 : 참여기술자 투입인원 및 시기 조정계획〔시설관리과-6492(2014.12.15.)〕

□ 동절기 건설사업관리기술자 현황

월별	계	책임건설사업 관리기술자	분야별건설사업관리자
			강북	강남
계	6명	2명	2명	2명
1월	3명	장규태(이준) *************	김경중(이준) *************	조인택(삼안) *************
2월	3명	장규태(이준) *************	양갑섭(이준) *************	황연진(건양) *************

□ 동절기 건설사업관리기술자 운영계획

❍ 근무(대기)장소 및 과업내용 변경

구분	당 초	변 경
근 무 지	- 중부수도사업소 (출근 및 대기)	- 1월 : 서부수도사업소, 2월 : 강서수도사업소
업무내용	동절기 작업시 용역업무 수행	동절기 작업시 용역업무 수행 및 ‘15년 시행예정인 노후밸브 현황 조사

※ ‘15년 노후밸브 교체를 위한 현황조사 협조 요청(서부, 강서)

❍ 시설물공사 건설사업관리 관련

- 사업소 시설물 공사 발생시에는 사업소에서 본부로 보고하여 본부에서 용역        계약업체에 용역업무 지시

□ 행정사항

❍ 해당 근무 수도사업소에서 출근부 및 근태사항 관리

❍ 수도사업소 및 용역 계약업체에 본 계획서 통보. 끝.