함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	준공기한 연기 통보(시설물보수 지시번호5-2,4번)

「2014년 관악, 금천구관내 상수도 시설물, 소화전설치 및 보수공사(장기계속단가계약) 준공기한을 아래와 같이 연기 (동절기 기온강하 및 단수작업) 통보하오니, 상수도시설물 정비공사에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

지시번호	위 치	지시내용	준공기한		연기사유
			당초	변경
관악소화전보수-5-2	봉천동100-286	소화전 및 밸브교체	2014.11.21. ~2015.01.06	2014.11.21. ~2015.02.27	동절기 기온급강하 및 단수작업
관악소화전보수-5-4	신림동500-12	소화전 및 밸브교체	2014.11.21. ~2015.01.06	2014.11.21. ~2015.02.27	동절기 기온급강하 및 단수작업

가. 통보내용

끝.

	남부수도사업소장
수신자	(주)카본코리아,(주)이준엔지니어링
주무관	정헌석		주무관	강동길		급수운영과장	01/07 장시명
협조자
시행	급수운영과-280	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	3146-4576	/전송	3146-4589	/	hundol@seoul.go.kr	/	대시민공개