문서번호	토목부-406
결재일자	2015.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	최광무	01/08 노우성

- 선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사 -

교통관리계획 변경 용역비 반영 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1.

도시기반시설본부

(토 목 부)

- 선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사 -

교통관리계획 변경 용역비 반영 검토보고

고덕동 4차로를 임시 개통하여 운영중이나 인근 주민들로부터 동명공원앞 교차로 및 암사 정수장 사거리 임시개통에 따른 횡단보도 신설, 보행신호등 설치요구에 따라, 서울지방경찰청 교통규제심의자료 작성을 위한 교통관리 변경 계획 용역을 시행하고 용역비 반영을 위한 검토 보고임.

근 거

○ 동명근린공원앞 교차로 민원사항을 반영한 교통규제심의 ‘가결’

(서울지방경찰청 교통관리과-20855(2014. 7. 28.)

○ 공사중 교통소통대책에 따른 기간연장 및 교통안전시설 변경 설치 통보(정수장앞 교차로)

(서울지방경찰청 교통관리과-30192(2014.10.30.)

공사개요

○ 위    치 : 강동구 암사동 440-1 ~ 고덕동 165-11(아리수로)

○ 사업규모 : 아리수로 확장 폭 2차로 → 4 ~ 6차로, 연장 3.72km,

○ 사업기간 : 2009. 1. 6. ~ 2015.12.31.

○ 총사업비 : 146,077백만원 (도급액 : 35,444백만원)

○ 시 공 사 : ㈜대저건설외 1사

○ 감 리 사 : ㈜한국관리공사

보고내용

○ 실정보고 이유

- 고덕동 4차로를 임시 개통하여 운영중이나 인근 주민들로부터 동명공원앞 교차로 및 암사 정수장 사거리 임시개통에 따른 횡단보도 신설, 보행신호등 설치요구에 따라, 서울지방경찰청 교통규제심의자료 작성을 위한 교통관리 변경 계획 용역을 시행하고 용역비 반영을 위한 검토 보고임.

○ 단가검토

- 낙찰률 81.14%

- 강제협의율 = (설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가+동 단가에 낙찰률 곱한 금액)/2

= (100 + 81.14) / 2 = 90.57%

- 용역비 산출 내역

(단위 : 천원)

위치	공 종	견 적 서			적용방안	비고
		A사	B사	C사
동명공원앞	공사중 교통관리계획비	8,500	8,800	9,900	A사 적용
	협의률 적용 (90.57%)	7,700
암사정수장 교차로	공사중 교통관리계획비	9,500	10,500	10,900	A사 적용
	협의률 적용 (90.57%)	8,604

○ 공사비 증·감현황

(단위:천원)

구 분	단위	당 초	변 경	증 · 감	비고
순공사비	식	-	-	-
제 잡 비	식	-	-	-
소 계		-	-	-
공사중 교통관리계획 용역비	식	-	16,304	16,304
부 가 세	식	-	1,630	1,630
도급공사비		-	17,934	17,934

□ 감리단 검토의견

○ 서울특별시 도로점용 공사장 교통소통대책에 관한 조례(2007. 1)에 의거 고덕동 4차로 임시 개통에 따른 횡단보도신설 민원 및 암사정수장 교차로 임시개통에 따른 횡단보도 및 보행자 신호등 신설 등 공사중 교통관리 계획에 따라 서울지방경찰청 규제심의자료 작성을 위한 용역을 시행하고 설계변경 반영을 위한 실정보고 사항임.

○ 교통소통대책수립 대행 전문기관의 견적서중 최저금액을 제시한 A업체 16,304천원(협의율적용, 부가세별도)로 적용함.

※ 검토결과 공사계약 일반조건 Ⅵ.공사설계의 변경  1.설계변경 “가‘’ 항목중 4) 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우를 근거로 하여 추후 설계변경함이 적정하다고 사료됨.

□ 조치계획

○ 동명근린공원앞 교차로와 암사정수장 교차로 횡단보도, 보행신호등 설치를 위한 서울지방경찰청 교통규제 심의 자료 작성을 위한 교통관리 변경 계획 용역을 시행하고, 설계변경 반영을 위한 실정보고에 대하여 감리단 검토의견과 같이 승인하고자 하며, 증액되는 공사비에 대하여는 설계변경에 반영하고자 함.

- 추가 공사비(교통부분 용역) 17,934천원

붙 임 :  1. 감리단 검토의견서 2부.  끝.