투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	서울제물포터널 민간투자사업 설계감리용역 재개알림

1. 관련근거

- 토목부-23458(2013.12.16.)호, 제물포터널 제15-2(2015. 1. 8.)호

2. 민자사업인 서울제물포터널사업의 실시설계감리 용역이 아래와 같이 재개되었음을 알려 드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가.용역명 : 서울제물포터널 민간투자사업 실시설계 감리용역

나.위  치 : 양천 신월동(신월IC)~영등포 여의도동(여의대로,올림픽대로)

다. 규   모 : 왕복4차로 연장 7.53km

라.과업기간 : 2013. 4.24 ~ 2013.12.24.(착수일로부터 8개월)

마.과업중단일 : 2013.12.16.

바.과업재개일 : 2015. 1. 8.

사.재개사유

- 감리기간 연장에 따른 감리비가 협의 완료됨에 따라 설계감리 재개 요청(제물포터널 제15-2(2015. 1. 8.)호)

아.행정사항 : 과업기간 연장 등 설계변경조치.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(도로계획과장),설비부장
주무관	이석근		토목설계과장	조성만		토목부장	01/08 노우성
협조자
시행	토목부-418	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15(서소문동 37) 서울특별시청 서소문별관 2동 3층 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2588	/전송	02-3708-2599	/	sttomog@seoul.go.kr	/	대시민공개