보    고    서

등록번호	시설관리과-791

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	이생기	최명익	전결 01/08 나태산

명에 의거 지역담당 업무수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

2015.   1.

복 명 자 : *************

공사현황

❍ 공 사 명 : 2014-1 창신동 등 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)

❍ 현   황

지시번호	공사 위치	지시기간	연기요청일	비 고
신설-64	********	2012.12.30 ~01.09	2015.2.28	수요가의 공사준비 및 보호통설치공간 미흡으로 공간 확보 후 공사가능으로 공사완료시까지 연기하고자 함.
개량-43	***********	2012.12.30 ~01.09	2015.2.28	노후밸브 교체시기 수요가와 협의 후 교체 작업예정으로 공사완료시까지 연기하고자 함.

❍ 요   지 : 공사기간 연기

보고내용

❍ 위와 같이 급수공사 작업지시 하였으나, 공사일정 재협의 후 공사완료시까지  작업연기 하고자 함.

처리의견

❍ 상기와 같은 사항으로 위 작업지시 건에 대한 공사기간을 공사가능시(연기요청일)까지 연기코자 합니다.

❍ 귀책사유 : 중부수도사업소

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.