문서번호	시설개선과-233
결재일자	2015.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설개선과장	체육시설관리사업소장
진종구	신동호	01/08 이구석
협 조
	주무관		이정원
	주무관		박관현

잠실운동장 고압케이블 교체공사 시행계획

2015. 1

체육시설관리사업소

시설개선과

잠실운동장 고압케이블 교체공사 시행계획

‘84년도 이전에 설치하여 장기간 사용에 따른 케이블 열화 및 노후로 성능이 저하된 고압케이블을 교체하여 전기 안전사고를 예방하고자 함.

		교체계획

❍ 교체대상 : ‘84년 이전에 설치된 고압케이블

❍ 공사구간 : 주변전실(1개소) ↔ 지구변전실(23개소)

❍ 변전실 현황                                                      (개소)

구 분	계	주경기장	야구장	실내체육관	수영장	보조경기장
계	26	16	5	2	1	2
교체대상	23	13	5	2	1	2
교체제외 (시기 미도래)	3 (2001년 설치)	3 올림픽전시관 중소기업변전실 전광판변전실

		예산현황

❍ 2015년도 예산현황

(단위:백만원)

사 업 명	사업내용	사 업 비	비 고
계		1,570
잠실운동장 고압케이블 교체공사	케이블교체 (변전실 22개소 14,781m) 공사 감리용역 사용전검사(한국전기안전공사)	670
잠실주경기장 노후 전력설비 교체공사	케이블교체 (변전실 4개소 3,264m)	295
	다, 라변전실 수배전반 교체(21면)	605

❍ 예산과목 : 시민체육시설 운영 및 관리, 노후체육시설 개보수사업, 잠실운동장 시설개보수

		공사발주

❍ 사업개요

- 사 업 명 : 잠실운동장 고압케이블 교체공사

- 사업내용 : 케이블 교체(18㎞), 공사감리 용역(용역타당성 심사후 별도발주)

- 계약방법 : 일반경쟁(공사) 및 소액 수의계약(감리용역)

- 사업기간 : 2015. 1 ~ 2015. 8월

- 소요예산 : 965백만원(케이블 교체공사 6.7억 + 노후전력설비 교체공사 2.95억)

※ 상기 2개 사업중 고압케이블 교체공사는 같은 공종으로서 시공품질의 향상과 효율적인

사업진행을 위해 통합발주

		행정사항

❍ 공사금액 변경(증 8,274천원)

- 발주금액 : 900,900천원 (‘14년 계약심사 금액 892,626천원)

- 변경사유 : 2015년도 공사 노임단가 변경

(단위:원)

구 분	2014년 하반기	2015년 상반기	증․감	비 고
내선전공	151,380	154,049	2,669
고압케이블공	222,944	226,338	3,394
보통인부	86,686	87,805	1,119
방수공	98,523	101,093	2,570
내장공	129,598	135,112	5,514

끝.