문서번호	도로계획과-17222
결재일자	2014.12.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	도로계획과장	시설안전정책관		도시안전실장
박재현	형태경	한제현		전결 12/31 조성일
협 조
	간선도로계획팀장		代김동수

사당로 도로확장사업

사업 추진계획 보고

2014. 12

도시안전실

도로계획과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	전문가 자문회의	)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	동작구청	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 □

사당로 도로확장사업 추진계획

서초역~방배로 간 도로개설공사 개통 및 주변개발사업에 따른 증가된 교통량처리를 위한 사당로 도로확장사업(구 범진여객~총신대) 타당성조사 및 기본계획 보완 용역결과 및 사업추진계획 보고임

□ 사업개요

○ 위    치 : 동작구 사당로(구 범진여객~솔밭로입구)

○ 규    모 : 도로확장 폭 25m→30m 확장, 연장 618m

○ 사업기간 : 2014. ~ 2018.

○ 총사업비 : 560억원

□ 추진경위

○ ‘00.12. : 이수역 ~ 남성초교 구간 사업완료

○ ‘07.11. : 사당로 확장 타당성조사 및 기본계획 준공

○ ‘12.08. : 남성초교 ~ 구 범진여객 구간 사업완료

○ ‘14.05.01 : 타당성조사 및 기본계획 보완용역 착수(준공기한 ‘14.12.23)

- 계약금액 : 32,692백만원

- 용역업체 : ㈜동일기술공사

○ ‘14.12.08 : 자문회의

○ ‘14.12.23 : 용역 준공기한 연기(‘15.1.30)

□ 현황 및 문제점

○ 이수역~남성초교구간은 8차선으로, 남성초교~구 범진여객구간은 6차선으로 확장완료하였으나 나머지구간(구 범진여객~숭실대입구)은 현재 4차선으로 도로병목으로 인해 출퇴근 시간대 상습정체가 발생하고 있는 실정으로, 장래 서초역~방배로간 도로 개통시(2017년 완료 예정) 교통량 증가에 대비하여 교통개선이 필요함

□ 타당성조사 검토결과

구 분		1안 (구 범진여객∼솔밭로입구)	2안 (구 범진여객∼총신대)
개 요		○ 구범진여객~솔밭로 구간 L=618m ○ 남부순환로와 연계된 솔밭로까지 확장	○ 구 범진여객~총신대 구간 L=935m ○ 사당로 구간중 총신대까지 확장
개요도	1안
	2안
사업비		560억원	890억원
경제성		1.13	0.78
특 징		○ 구범진여객~솔밭로까지 확장 ⇒ 남부순환로와 연계된 솔밭로까지 확장 ○ 보도폭원 4.25m 적용 ⇒ 기존보도폭원(5.0m)에 비해 다소감소 ⇒ 자전거도로 설치시 보행자겸용으로 확보가능 ○ 편입지장물 증가 ⇒ 편입면적 : 17,119㎡ ⇒ 편입건물 : 20동(상가)	○ 구범진여객~총신대까지 확장 ⇒ 사당로구간중 총신대까지 확장 ○ 보도폭원 4.25m 적용 ⇒ 기존보도폭원(5.0m)에 비해 다소감소 ⇒ 자전거도로 설치시 보행자겸용으로 확보가능 ○ 편입지장물 증가 ⇒ 편입면적 : 27,110㎡ ⇒ 편입건물 : 43동(상가)

□ 자문회의 결과

○ 일    시 : 2014.12.08.(월)

○ 주요자문의견 및 조치사항

주요 자문의견	조치사항
비교1안이 타당할것으로 판단되며, 최대한 건물저촉이 최소화 될수 있도록 검토하여 사업비 최소화 방안 강구	당초 용지보상비는 공시지가 3배를 적용하였으나 교통시설투자지침에 의해 2.296배 적용, 선형변경을 통해 지장물 2개소를 피해 보상비를 저감하였음
동작대로→남부순환도로의 우회도로기능을 하는 만큼 솔밭로를 포함한 우회 가능 구간의 신호주기+TSM등을 확보하는 방안 검토	교통체계관리기법(TSM)은 추후 기본 및 실시설계 시 반영
환기구 이설시 안전을 감안 환기구 설치기준이 반영되도록 검토	‘14.11월 규정된 환기구 설치기준에 맞춰 도시철도공사와 협의하여 계획

□ 추진계획(안)

○ 사당로 도로확장에 대한 교통량, 경제적 타당성, 시공여건 등을 고려할 때 구 범진여객~솔밭로입구(안)으로 추진하는 것이 타당함

□ 향후계획

○ `15.1.30   : 타당성조사용역 준공

○ `15년이후 : 투자심사(재정담당관) 결과, 우리 시 재정여건 등을

감안하여 설계 및 사업비 확보 등 추진

따로붙임 : 1. 설계자문 검토의견 조치결과 1부.

2. 평면도 1부. 끝.