문서번호	토목부-498
결재일자	2015.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
양준식		명경출	01/09 노우성
협조
	주무관		김구

“강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사 과천구간”

도시계획시설 변경에 따른 설계비 반영

2015. 1.

도시기반시설본부

(토    목    부)

“강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사 과천구간”

도시계획시설 변경에 따른 설계비 반영

강남순환도시고속도로(8공구) 구간 중 과천시 관할구역의 도시계획시설 변경결정(2013. 8.16.)됨에 따라 사업추진을 위한 실시계획인가 자료작성에 소요된 설계비를 공사비에 반영코자 보고하는 것임.

※ 과천시구간 도시계획사업 추진계획 방침(토목부-21996호, 2013.11.27.)

Ⅰ				사업개요

❍ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

❍ 위    치 : 서초구 우면동 ~ 과천시 주암동~강남구 수서동

❍ 공사규모 : 폭 4~10 차로,  연장  7.96km

- 교  량 2개소(0.52km), 지하차도 4개소(2.79km)

❍ 사업기간 : 2002. 7. 3 ~ 2018. 7. 31(민자접속부 2016. 5월)

❍ 사 업 비 : 355,198백만원

Ⅱ				추진경위

❍ 2002. 07. 03 : 공사착수

❍ 2003. 06. 02 : 공사중단 (고가차도 반대민원 )

❍ 2003. 11. 19 : 고가차도 지하화 시행방침 (부시장 제395호)

❍ 2011. 12. 20 : 과천시구간 중앙분쟁조정위원회 심의의결

❍ 2013. 08. 16 : 과천시구간 도시관리계획결정(과천시고시 제2013-51호)

❍ 2013. 11. 27 : 과천시 구간 도시계획사업 추진계획 방침(토목부-21996호)

❍ 2014. 12. 15. : 도시계획관련 설계비 반영 실정보고(동기강2014-382호)

Ⅲ				관련근거

❍ 도로업무 편람(국토교통부, 2013년)

❍ 국토개발계획 표준품셈(한국엔지니어링 진흥협회, 2007.11.)

❍ 엔지니어링 사업대가 기준(2012-178호, 2012.7.30.)

❍ 건설표준품셈(2013년)

Ⅳ				설계비 검토

❍ 개략 공사비 산출

- 개  요 : 총연장 1.56km,  공사비 10,733백만 원

※ 2013년 도로업무편람 도로조성비(국도확장 및 신설) 평균단가 적용 (국토교통부)

➩ 국도확장 122억원/km(제잡비 포함),     ➩ 국도신설 152억원/km(제잡비 포함)

❍ 설계비 및 단가산출

- 엔지니어링 사업대가 기준에 의한 공사비 요율방식 적용

- 단가는 공사비 신규단가 협의율 적용 : (설계가+낙찰가)/2=79.855%

❍ 공사비 증․감                                           (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증/감	비 고
조 사 측 량	-	11,100,143	증)11,100,143
실 시 설 계	-	293,986,000	증)293,986,000
실시설계 인가	-	20,547,061	증)20,547,061
계	-	325,633,204	증)325,633,204
협의율 적용 (79.855%)	-	260,000,000	증)260,000,000	단수정리 (△34,394)
부 가 세		26,000,000	증)26,000,000
추가공사비 (설계비)		286,000,000	증)286,000,000

Ⅳ				검토결과 및 조치계획

❍ 과천시구간 도시관리계획 변경에 의한 추가사항 설계비는 위 검토내용과 같이 적정하다고 사료되는바,

❍ 감리 검토의견에 따라 승인하고 강남순환도로(8공구) 공사비에 설계변경 자문회의를 거쳐 설계변경(증액)을 추진토록 하고자 함.

붙  임 : 1. 감리검토의견서. 1부.

2. 실정보고서 1부.  끝.