보  고  서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이철	김기상	01/09 장시명

제 목 : 급수공사 연기 보고

=============================================================

명에 의하여  급수공사 업무수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

▢ 현 황

연번	위 치	공사개요	작업지시 번호	비 고
1	**************	신설	******

▢ 보고 내용

○ 상기 공사건에 대하여 작업지시를 하였으나, 건축공사 현장에 자재적치 및 공사장 비계 미철거 등 건축공사 지연과 기존관 분기지점의 철거폐쇄의 분기기점 확인의 어려움등 현장여건에 따른 굴착어려움에 따른 공사연기 요청이 있어 연기가 필요한 실정임

▢ 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 조치 의견

○ 위와 같은 실정으로 아래와 같이 공사기간을 연기하여 급수공사 시행에 만전을 기하고자 합니다.

작업지시 번호	당초 작업기간	변경 작업기간	비 고
******	’14.11.28 ~ ‘15.1.10	’14.11.28~‘15.1.23

붙임 : 상수도공사 연기원 1부.(별도첨부)  끝.