함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 책임사업관리자
(경유)
제 목	계약금액조정 심사결과 알림

1. 고도정수반-6632(2014.12.29.)호 및 재무회계과-344(2015.01.09.)호와 관련입니다.

2. 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사의 조경시설물 및 식재 등에 대한 계약금액조정 심사결과를 붙임과 같이 알려드립니다.

○ 심사결과 내역

(단위 : 천원)

구 분	심사요청금액	심사 조정금액	증·감
조경시설물 및 식재	212,300(감)	213,512(감)	감)1,212
보안시설 및 음수대설치	78,111(증)	77,913(증)	감) 198

붙임 : 1. 계약금액조정 심사결과 통보공문 1부.

2. 계약금액조정 검토결과서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	이재학		고도정수반장	남정열		시설안전부장	01/09 강신재
협조자
시행	고도정수반-225	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1453	/전송	3146-1429	/	hak2509@seoul.go.kr	/	대시민공개