문서번호	설비부-377
결재일자	2015.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
김두환		이달영	01/09 박기형
협 조

- 겸재교 건설 및 연결도로 확장 전기공사 -

예비준공검사(4차분) 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 01

	도시기반시설본부
	[설 비 부]

- 겸재교 건설 및 연결도로 확장 전기공사 -

예비준공검사(4차분) 계획 보고

겸재교 건설 및 연결도로 확장 전기공사(4차)의 준공기한('15.02.28)이 도래함에 따라 관련근거에 의거 준공前 예비준공검사를 다음과 같이 실시하여 공사 준공처리에 만전을 기하고자 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 겸재교 건설 및 연결도로 확장 전기공사

□ 공사위치 : 서울시 동대문구 휘경동 ～ 중랑구 면목동 동2동 사거리

□ 공사규모 : 본교량(B 20m, L 235m), 도로확장(L 750m)

가로등×90등, 야간경관조명×1식, 교량점검등×110등

□ 공사기간 : 총차 2010.02.05.～2015.12.31.(4차2014.02.24～2015.02.28)

□ 도 급 비 : 총차 금671,056,000원(4차 금176,130,000원)

□ 시 공 사 : (주)유성전기 대표 유명호

□ 감 리 사 : (주)동일기술공사

Ⅱ		관련근거

□ 책임감리 현장참여자 업무지침서(국토행양부 고시 제2012-542호,'12.08.21)

□ 제62조(예비준공검사)

□ 예비준공검사(4차분) 수행 계획 보고

□ 동일(겸재)감 제15-4호('14.01.09)

- 공    사    명 : 겸재교 건설 및 연결도로 확장 전기공사(4차)

- 준공금액(4차) : 금176,130,000원

- 준공기한(4차) : 2015.02.28

Ⅲ		예비준공검사 계획

□ 예비준공검사 일시 : 2015.01.13(화)

□ 예비준공검사 참여자

□ 검사자(소속직원 2명)

- 도시기반시설본부 설비부 환경설비과(지방공업주사 박태욱)

- 도시기반시설본부 설비부 환경설비과(지방공업주사보 박시현)

□ 입회자(감리원 1명, 현장대리인 1명)

- 책임감리원(단장), 형장대리인(전기)

□ 예비준공검사 내용

□ 준공기한(4차) 내(內) 준공가능 여부 및 미진사항의 사전 점검 보완

□ 시공자가 제출한 품지시험․검사 총괄표에 대한 감리원의 검토서를 첨부하여 예비준공검사자에게 제출

□ 감리원이 확인한 정산설계도서, 점검표 등에 의거 검사(지적사항 작성)

□ 예비준공검사 실시결과 조치계획

□ 예비준공검사 실시결과 지적사항에 대하여는 감리원에게 보완지시

□ 예비준공검사의 지적사항 등을 완전히 보완하고 책임감리원의 확인 후 준공검사원 제출

Ⅳ		향후 계획

□ 2015.01.13일 : 예비준공검사(4차분) 실시

□ 2015.02.28일 까지 : 준공처리(4차분) 완료

따로붙임 : 예비준공검사 현장점검표 1부. 끝.