문서번호	토목부-550
결재일자	2015.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목부장
최진우		01/09 노우성
협조

북단IC 조경복구계획 검토 보고

《 월드컵대교 건설공사 》

2015. 1.

도시기반시설본부

( 토  목  부 )

북단IC 조경복구계획 검토 보고

《 월드컵대교 건설공사 》

공사현황

❍ 공사규모 : 폭 31.4m(6차로), 연장 1,980m

❍ 공사기간 : 2010. 3.22. ~ 2015. 8.22.

❍ 공 사 비 : 176,063백만원

❍ 시공사 및 감리단 : 삼성물산(주) 외 2개사 (주)포스코엔지니어링 외 1개사

보고내용

❍ 관련근거 : 월드컵감리 2015-5(2015.1.7)

❍ 북단IC 램프신설에 따라 하늘공원, 평화공원, 난지한강공원이 저촉되어 조경복구가 필요하나 일부구간은 설계에 누락되어 있으며 단순히 씨앗뿜어붙이기, 거적덮기, 떼작업등 단순한 공법으로 설계되어 있어 기존공원과 연계된 조경복구계획 필요함

- 유지관리기관인 서부공원녹지사업소등 4개 기관의 조경복구계획에 대한 검토의견을 반영

내부순환로

증산로(C)

월드컵대교

F : 내부순환로→월드컵경기장 진출

RAMP-F

하늘공원(D)

평화의공원(A)

난지한강공원(E)

강변북로(B)

위 치	구간	유관기관	당 초 설 계	비고
평화의 공원	A	서부공원녹지사업소	씨앗뿜어붙이기 및 거적덮기 5,793㎡ 떼작업 4,219㎡ (기존 공원과 부조화)
강변북로	B	시설관리공단
증산로	C	마포구청
하늘공원	D	서부공원녹지사업소	설계 누락
난지한강공원	E	한강사업본부	실시설계(‘06) 이후 난지한강공원 조성(‘10)으로 조경복구계획 미반영

조경복구 변경안

❍ 기존 공원 수림과 조화, 기존 공원 산책로와 연계, 미관을 고려한 경관수 식재 및 배식체계를 현지 지형에 맞게 배치한 조경복구 계획

구분	하늘 공원	평화의 공원
당초	설계누락	씨앗뿜어붙이기, 거적덮기, 떼 작업
변경	신설도로 공 원 공원훼손구간 교목, 관목, 초화류, 잔디 식재	신설도로 공 원 교목, 관목, 초화류, 잔디 식재

❍ 공사규모

관련기관	공 사 규 모	비 고
서부공원녹지사업소	교목 1,396주, 관목 47,500주 초화류 2,025본, 잔디 6,219㎡
마포구청	교목 313주, 관목 11,900주 초화류 28,300본, 잔디 5,371㎡
시설관리공단	교목 272주, 관목 15,850주 초화류 7,800본, 잔디 4,791㎡
한강사업본부	교목 85주, 관목 34,350주 잔디 11,157㎡

감리단 검토의견

❍ 북단IC 조경복구 설계가 일부구간 누락 및 ‘06년 설계완료 후 조성된   난지한강공원(‘10년)으로 현장 여건이 상이한 바, 금회 실정보고하는 조경복구계획은 ‘15년~‘16년 단계별 북단IC 부분 개통시 주변공원과의 조화와 서울시민 휴식 명소로서 기능을 유지하도록 설계하였으며,

❍ ‘15년 하반기 부분개통 후 유지관리기관에 이관시 문제가 발생하지 않도록 서부공원녹지사업소, 마포구청, 한강사업본부, 시설관리공단 등 관련기관의 협의 내용도 반영하여 적정하게 조경복구계획을 수립하였음

관련기관	협 의 내 용	비고
서부공원녹지사업소 녹지조경팀	기존수목과 조화로운 배식계획수립 차도와 공원측의 접근방지시설 메타쉐콰이어 가로수길 연속성 확보
마포구청 공원녹지과 조경팀	전용차로 가로수는 가급적 지양 상록수와 침엽수의 조화 단풍나무, 목련 등 적극 활용
시설관리공단 시설안전본부 도로환경처	향후 이관시 명확한 구분 필요 수목의 생육에 적합한 토양 사용 수목에 대한 동해방지 대책
한강사업본부 녹지관리과	수목의 조화로운 배식계획 작성 시민의 휴식시설 및 그늘목 식재

❍ 공사비 현황

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비고
직접공사비	서부공원녹지사업소	43,640	943,021	899,381
	마포구청	-	557,537	557,537
	시설관리공단	-	413,916	413,916
	한강사업본부	-	328,756	328,756
	소 계	43,640	2,243,230	2,199,590
제 경 비		21,672	779,570	757,898
도 급 비		65,312	3,022,800	2,957,488

❍ 적용단가

- 기존단가 : 낙찰율 적용(64.008%)

- 신규단가 : 강제협의율 적용(82.004%)

조치계획

❍ 책임감리원이 제출한 북단IC 조경복구계획 변경 실정보고에 대하여 내용 검토한 바 타당한 것으로 판단되므로 추후 기술심사담당관 사업계획변경조정위원회 심의, 설계변경자문회의 심의를 득한 후 설계변경을 시행하여 공사추진에 만전을 기하고자함.

- 추가 공사비 : 2,957백만원

붙 임 : 1) 관련공문 1부.

2) 감리단 공문 1부.  끝.