문서번호	토목부-521
결재일자	2015.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
박상철		최광무	01/09 노우성
협조

본선 종 배수관로 변경 검토보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1.

도시기반시설본부

(토 목 부)

본선 종 배수관로 변경 검토보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

암사IC 서원마을의 V형 측구에 연결되어 있는 배수로를 RAMP-B 자전거도로 방향으로 변경하여 배수처리에 원활을 기하고 주민민원을 해소코자하는 사항임

공사개요

○ 공 사 명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사

○ 공사규모 : 도로개설 B=31.5m, L=1,880m

○ 공사기간 : 2012. 8. 2. ～ 2015. 6.30.

○ 도 급 비 : 18,161백만원

○ 시 공 사 : ㈜신성건설외 2개사

○ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링외 1개사

현 황

○ 본선 명일역방향 종배수관이 서원마을의 V형 측구에 연결토록 설계되어 있음

감리단 검토의견

○ 본선 종배수관(명일역방향)의 V형 측구 연결은 도로의 우수가 마을쪽으로 배수 되도록 계획되어 있으나 서원마을 주민들로부터 민원이 야기되고 있어

○ RAMP-B의 자전거도로 방향으로 종배수관을 연결하여 천호 3수문으로 배수처리 하고자 하며 이로 인한 공사비 28,500천원은 추후 설계변경시 반영코자 함.

조치 의견

○ 감리단 검토의견과 같이 승인하고 추후 설계변경 시 정산 처리함이 타당하다고 사료됨.

- 개략공사비 : 증 29백만원.

붙  임 : 책임감리원 검토의견서 1부.  끝.