문서번호	조경과-483
결재일자	2015.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	조경시설팀장	조경과장		푸른도시국장
최경주	한정훈	이원영		01/12 오해영
협 조

‘15년 노후 마을마당 보수정비(주민참여 예산) 추진계획

2015. 1.

푸른도시국

(조경과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(	제안주민	)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	강북구 등 3개구	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

‘15년 노후 마을마당 보수정비(주민참여 예산) 추진계획

주민 스스로 지역에 필요한 사업을 발굴하여 추진하는 ‘2015년도 주민참여 예산’ 사업 대상지로 선정된 강북구 인수동 마을마당 등 3개소의 노후 시설물 정비를 통하여 민원해소 및 쾌적한 마을쉼터로 조성하고자 함.

추진근거

예산담당관-8902(2014.7.31.)호 ‘2014년 주민참여 예산사업 선정 통보

추진방향

주민이 자발적으로 동네 마을마당을 가꾸고 관리할 수 있도록 참여프로그램 추진

주민편익시설 설치 및 정비 보수로 안전하고 쾌적한 공간으로 조성

사업개요

대 상 지 : 강북구 인수동 마을마당 등 3개소 (구유지)

구 분	인수동 마을마당	개봉1동 마을마당	부군당 마을마당
위 치	강북구 인수동 553-3	구로구 개봉동 38-75	동대문구 전농동 270-41
면 적	695㎡	155㎡	801㎡
사업내용	야외체육시설 설치	철조망 철거 후 녹지조성 등	옹벽 및 위험수목 정비 등
사 업 비	20백만원	80백만원	40백만원
시행기관	강북구 푸른도시과	구로구 공원녹지과	동대문구 공원녹지과

사업기간 : 2015. 1. ~ 10.

예산과목

- 인수동마을마당 : 조경과, 생활주변 녹지확충, 생활주변 녹지확충, 인수동 마을마당 보수정비(주민참여), 자치단체등자본이전, 자치단체자본보조(403-01)

- 개봉1동마을마당 : 조경과, 생활주변 녹지확충, 생활주변 녹지확충, 개봉1동 마을마당 보수정비(주민참여), 자치단체등자본이전, 자치단체자본보조(403-01)

- 부군당마을마당 : 조경과, 생활주변 녹지확충, 생활주변 녹지확충, 부군당 마을마당 보수정비(주민참여), 자치단체등자본이전, 자치단체자본보조(403-01)

추진일정

2015. 1.      : 사업계획 수립 및 시달

2015. 2. ~ 3. : 주민의견 수렴, 설계 등

2015. 4. ~ 6. : 공사발주 및 시행

2015. 7.      : 공사준공

기대효과

주민휴식 공간이 부족한 주민들에게 쾌적한 공원환경을 제공

민원 등을 사유로 이용이 제한된 마을마당에 주민편익시설을 설치하여 개방 이용, 공원녹지 이용만족도 제고

훼손된 옹벽의 개축으로 안전사고 방지 및 쾌적한 환경 조성

행정사항

자체설계에 따른 ‘도면작성비’ 배정 요청하여 설계심의 요청

설계심의 결과에 따라 공사비 지급 및 공사시행

사업 착공 및 준공보고 5일 이내 보고

붙임 :  위치도 및 현황사진 1부.  끝.

(붙임 1)

노후마을마당 보수정비(주민참여 예산) 대상지

연번	자치구	대상지	면적 (㎡)	예산액 (백만원)	사업내용
계	3개구	3개소	1,652	140
1	강북구	인수동 마을마당(인수동 553-3)	695	20	야외체육시설 설치
2	구로구	개봉1동 마을마당(개봉동 38-75)	155	80	철조망 철거 후 녹지조성 등
3	동대문구	부군당 마을마당(전농1 272-1)	802	40	옹벽 및 위험수목 정비 등

(붙임 1)

□  대상지 현황사진

인수동 마을마당
인수동 마을마당 위치도	인수동 마을마당 현황사진
개봉1동 마을마당
개봉1동마을마당 위치도	개봉1동마을마당 현황사진
부군당 마을마당
부군당 마을마당 위치도	부군당 마을마당 현황사진