문서번호	공원운영과-493
결재일자	2015.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	공원운영과장	★서부공원녹지사업소장
김숙경	박미성	조준수	01/12 안해칠
협 조

하늘공원 포토존 조성공사

준공기한 연기 검토보고

서부공원녹지사업소

공원운영과

하늘공원 포토존 조성공사

준공기한 연기 검토보고

하늘공원 포토존 조성공사가 계속되는 한파로 공사진행이 어려워 준공기한을 연기하고자 함.

Ⅰ		공 사 개 요

❍ 위    치 : 하늘공원 정상 입구

❍ 사업내용 : 기존화단 철거, 포토존 7개소 조성

❍ 공사기간 : 2014. 12. 29. ~ 2015. 1. 22.

❍ 도급업체 : 계림조경(주) 대표 김충일

❍ 도 급 비 : 금16,550,000(금일천육백오십오만원)

Ⅱ		준공기한 연기 검토

❍ 준공기한

┌ 당    초 : 2015. 1. 22.

└ 변    경 : 2015. 2. 25.

❍ 준공기한 연기사유

- 2014.12.26.일 공사계약 후 계속된 한파로 터파기공사, 콘크리트 타설공사 등의 진행이 어렵고 콘크리트 양생의 경우 기온이 낮으면 하자발생우려가 있어 준공기한을 연기하고자 함

❍ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 서부공원녹지사업소

❍ 지체상금 : 미부과

Ⅲ		검 토 의 견

❍ 지속된 한파로 공사진행이 원활하지 않아 준공기한을 2015. 2. 25일까지  연기하여 공사품질 향상에 만전을 기하고자 함.  끝.