문서번호	설비부-449
결재일자	2015.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
김경남		김영수	01/13 박기형
협조

『 송정사근 빗물펌프장 증설공사 』

기계분야 예비준공검사 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  1.

도시기반시설본부

(설  비  부)

『 송정사근 빗물펌프장 증설공사 』

기계분야 예비준공검사 시행계획

송정사근 빗물펌프장 증설 기계공사와 관련 위탁 감독기관인 시설관리공단으로부터 예비준공검사 요청이 있어 이를 시행하고자 함.

1		공사개요

○ 공사기간 : 2013.05.08. ~ 2015.01.30

○ 계약금액 : 총차273,883천원(1차 - 94,611천원, 2차 – 179,272천원)

○ 공사규모

- 펌프 증설 : 308㎥/min*900Hp*2대(송정), 510㎥/min*1,600Hp*2대(사근)

- 펌프실 증설 1식

○ 시 공 사 : 주신공영(주)

○ 위탁감독 : 시설관리공단, ㈜동화이엔씨

2		관련근거

○ 시설관리공단 공사감독3처-267(2015.01.09.)호

- 예비준공검사 알림(송정사근 빗물펌프장 증설 기계공사)

○ 동화C15-4(2015.01.09.)호

- 송정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사 예비준공검사 일정의 건

3		예비준공검사 실시

○ 검사일시 : 2015.01.15.(목) 14:30 ~

○ 검사장소 : 사근 및 송정 빗물펌프장 증설공사 현장

○ 검 사 자 : 설비부 주무관(공업주사 정광식)

○ 입 회 자

- 시설관리공단 위탁감독, 비상주감리원(소방)

- 성동구청 유지관리부서(치수방재과) 직원

- 시공사 현장대리인 등

○ 검사내용

- 자재 품질 및 시공상태 및 준공요청 부분 완료여부 확인

- 준공을 위한 사전 준비 내용 등

4		추진일정

○ 2015.01.15. : 예비준공검사 실시

○ 2015.01.16. : 예비준공검사 결과 보완 지시

○ 2015.01.30. : 준공검사 예정

5		행정사항

○ 예비준공검사에 참여하도록 유지관리기관인 성동구청과 협의

붙 임 : 예비준공검사 현장 점검표 1부. 끝.