	서울특별시체육시설관리사업소
수신자	시설개선과장
(경유)
제 목	변경계약 체결알림(잠실종합운동장 남문환경개선사업 지급자재 구매)

1. 시설관리과-352(2015.01.13)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 변경계약(납품기한 변경) 요청한 “잠실종합운동장 남문환경개선사업 지급자재 구매”건에 대하여 다음과 같이 변경계약 체결하였음을 알려드리오니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

□ 변경계약 체결내역

계 약 업 체			계약금액	납품기한		비 고
상 호	대표자	주 소		당 초	변경후
물춤워터아트㈜	신건수	서울시 용산구 백범로 284-1	변경없음	2015.01.13	2015.02.28	본공사 연기에 따른 납품기한 연기

따로붙임 : 변경계약서 1부. 끝.

	운영기획과장
주무관	최현희		운영기획과장	01/13 김남대
협조자	주무관	권수식
시행	운영기획과-474	(		)	접수		(		)
우	138-221	서울 송파구 올림픽로 25 (잠실동 10)	/
전화	02-2240-8804	/전송	02-2240-8880	/	0922chh@seoul.go.kr	/	대시민공개