투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	조달청장(예산사업관리과장)
(경유)
제목	물가변동(제4회)으로 인한 계약금액 조정 사전검토 의뢰 (서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사)

우리 본부에서 시행하고 있는『서울지하철 9호선3단계 920공구 건설공사』와 관련하여 물가변동으로 인한 총사업비를 조정하고자 사전검토를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울지하철9호선3단계 920공구 건설공사

나. 관리번호 : 제0*******00호

다. 계약금액 : 153,217,537,000원

라. 물가변동 적용내용(4회)

연번	구 분	금액 및 기간(4회 E/S)	비고
1	도급금액	153,217,537,000원
2	비적용 대상금액	71,270,900,382원
3	물가변동 적용금액	81,946,636,618원
4	지수 조정율	3.23%
5	물가변동 경과기간	’12.01.01.~’14.09.01. (973일) (기준시점 ~ 비교시점)
6	물가변동 등락금액	2,646,876,000원
7	선금급 공제액	124,752,000원
8	물가변동 조정금액	2,522,124,000원

첨부 : 계약서, 내역서, 공사예정공정표, 공정보고서, 기성,준공조서 및 내역서

선금청구서 및 지급 확인서 혹은 통장사본, 물가변동 접수공문, 물가변동

종합의견서 사항, 물가변동 기타 참고사항, 물가변동 프로그램 CD 서류

일체 각 1부(별도송부).  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	신정		궤도과장	명경출		도시철도토목부장	전결 01/13 한동근
협조자	주무관	조태현
시행	도시철도토목부-439	(		)	접수		(		)
우	100-170	서울 중구 무교동 96번지 프리미어플레이스빌딩 9층 도시철도토목부	/
전화	772-7245	/전송	772-7306	/		/	대시민공개