문서번호	슬러지재활용과-78
결재일자	2015.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	난지물재생센터소장
김광모		김웅남	01/13 가길현
협 조
	주무관			홍징의

주변전실 및 1처리장 수배전반 교체 계획

2015. 1

난지물재생센터

(슬러지재활용과)

주변전실 및 1처리장 수배전반 교체 계획

주변전실 및 1처리장의 노후 수배전반을 교체하여 안정적인 전력공급 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

❍ 노후기전설비 5개년 개․보수계획(2015년 단위사업)

□ 구매개요

❍ 사 업 명 : 주변전실 및 1처리장 수배전반 제작구매 설치

❍ 사업기간 : 2015. 1월 ~ 7월

❍ 내용 및 규모 : 수배전반 49면(주변전실 7, 1처리장 42) 교체

위 치	명 칭	형식 및 규격	단위	수량	설치년도	비 고
주변전실	특고압반	ALTS반, LBS반, VCB반 등	면	17	‘05(5면) ‘08(3면) ‘10(2면) ‘14(7면)
	고 압 반	VCB반, 콘덴서반 등	면	31	‘95(16면) ‘01(1면) ‘05(16면) ‘08(6면)	‘95년 설치된 16면중 7면 교체
	변압기반	몰드 6600/380~220V 75KVA	면	1	‘05
	저 압 반	MCC반, 정류기/축전지반	면	2	‘08
1처리장	고 압 반	VCB반, 콘덴서반 등	면	8	‘08
	변압기반	몰드 6600/380~220V 750KVA	면	2	‘08
	저 압 반	ACB반, MCCB반, 정류기반 등	면	7	‘08
		MCC반(25), LOP반(17)	면	42	‘93	42면 전량교체

❍ 소요예산 : 485백만원

❍ 교체사유 : 수배전반 노후로 잦은 고장이 발생하므로 전력공급 안정화 및 안전사고 사전 예방을 위하여 교체코자 함

□ 세부구매계획

❍ 발주방법 : 조달청 다수공급자계약 2단계 경쟁

- 수배전반은 조달청 운영 『나라장터 종합쇼핑몰』에 다수공급자 물품으로 단가계약 등록되어, 조달청 업무처리기준에 의거 다수공급자계약 2단계 경쟁으로 5개사 이상의 계약 대상자를 제안요청하여 구매함

․ 근거 : 조달사업에 관한 법률 시행령 제7조의2(다수공급자 계약) 및 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준 제2조(제안요청 기준 등)

- 조합 추천 요청 및 통보

․ 서울·경기 소재 전기공사업 면허를 보유한 한국전기공업협동조합의 추천을 받은 MAS(다수공급자계약) 등록업체 5개사 선정

- 납품대상업체 선정기준

․ 표준평가방식을 통한 제안서평가 종합점수 최고득점 제안자 선정

․ 근거 : 다수공급자 2단계 경쟁 업무처리기준 제4조(납품대상업체 선정기준)

□ 향후일정

❍ ‘15. 01 조합에 적격업체 추천 요청

❍ ‘15. 02 발주 및 계약

❍ ‘15. 07 설치완료.  끝.