내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한연기에 따른 변경계약 요청(한강교량일상유지보수공사(1차) 책임감리용역)

1. 교량보수과-369(2015.1.12)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 “ 한강교량일상유지보수공사 책임감리용역(1차)” 의 준공기한 연기를 아래와 같이 의뢰하오니  조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 한강교량일상유지보수공사 전면책임감리용역(장기계속)(1차)

나. 도 급 자 : ㈜대한콘설탄트 대표 이우정 외 1

다. 착 수 일 : 2014. 4.10

라. 변경내역

구분	도급비		준공기한
	총용역금액	금차용역금액	총완수일자	금차완수일자
당초	1,197,980,000	485,100,000	2017. 4. 3	2015. 3. 5
변경	1,197,980,000	485,000,000	2017. 4. 3	2015. 5.31

마. 예산과목

- 교량관리,한강교량관리,한강교량일상유지보수,시설비 및 부대비,감리비

- 교량관리,한강교량관리,동호대교 기초구조물(우물통)보수공사,시설비 및 부대비,감리비

바. 공기연장사유 : 감리대상공사인 “동호대교 기초(우물통)보수공사”의 착수 지연에 따라 용역기간 연장

붙임 : 1. 준공기한연기 의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기 보고서 1부.

	교량안전과장
주무관	백운경		교량관리팀장	손수희		교량안전과장	01/13 이용심
협조자
시행	교량안전과-422	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울시 마포구 가양대로 203	/
전화	300-8452	/전송	300-8459	/		/	대시민공개