투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	도시철도토목부장
(경유)
제목	우이신설 도시철도 궤도공사 공법변경 의견제출

1. 도시철도토목부 - 282(2014.1.9.)호와 관련입니다.

2. 우이신설 도시철도건설공사는 사업시행자와 합의하여 26.5개월 공기연장 이후 공사가 계속 지연(계획 56.62%,실적54.9%,대비 96.9%)되고 있는 실정이며, 본선 구조물 완료구간(11.4Km중 8.0Km)에서 궤도공사 착수가 지연 뿐 아니라, 궤도공사 완료구간(본선 302m)에서의 PST 시공속도로 고려할 때 계약공기(12개월) 내에 궤도공사 완료가 불가하여 후속공사 차질로 인해 추가 공기지연이 우려되는 실정인 바, 더 이상 공기지연 없이 공사 완료 될 수 있도록 도시철도 시공실적이 많고	전구간 동시시공이 가능하여 공기지연을 최소화 할 수 있는 현장타설 방식으로 변경하는 것이 타당하다고 판단됩니다.  끝.

	도시철도사업부장
주무관	위성환		경전철1과장	박동룡		도시철도사업부장	01/14 이은상
협조자
시행	도시철도사업부-335	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울시 중구 청계천로 8길 프리미어 플레이스 9층	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7187	/전송	02-772-7305	/	wsh3402@seoul.go.kr	/	대시민공개