문서번호	도로보수과-291
결재일자	2015.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	동부도로사업소장
나철흠		김환겸	01/14 송상영
협 조
	주무관			박일연

테헤란로 동공탐사 결과에 따른 조사계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.01.

동부도로사업소

(도로보수과)

테헤란로 동공탐사에 결과에 따른 조사계획 보고

서울시 도로관리과에서 일본 지오서치(주)에 의해 도심부 주요도로 노면하부의 동공탐사 결과 발견된 우리사업소 관내 동공에 대한 도로굴착 및 원인조사 계획 보고임

Ⅰ	탐사개요

추진근거

❍ 일본업체 무상동공탐사 결과 조치계획보고(행정2부시장 방침제1호,2015.1.2)

❍ 동공탐사 결과 후속조치 시행(도로관리과-18534호,‘14.12.8)

탐 사 자 : 일본 지오서치(주)-주관 도로관리과(포장관리팀)

탐사기간 : 2014.11.30.~12.4

탐사결과 : 테헤란로 동공 4개소 발견

❍ 탐사노선 : 테헤란로 L=3.3㎞(10차로), 백제고분로 L=0.9㎞(6차로)

❍ 동공개요

노선	세부위치	평가 등급	공동규모(m)				동공주변 주요 지장물현황	비 고
			토피	가로	세로	깊이
테헤란로	포스코빌딩 앞	A	0.2	1.3	0.4	-	-상수,하수,통신
	동부금용센터앞	B	0.35	1.5	0.8	0.26	-상수,통신,한전,가스	내시경
	역삼아이파크@입구	C	0.5	0.7	0.8	-	-상수,하수,통신,전기
	강남역12번 출구	C	0.4	0.5	0.5	-	-한전,통신,가스
백 제 고분로	동공발생 없음

❍ 동공 세부위치 : 따로붙임 동공조사조서 참조(일본 탐사업체 조사)

Ⅱ	조사계획

굴착전 조치사항

❍ 동공위치 현장 표식(중심부 및 동공크기 페인팅) - 굴착복구업체

❍ 동공발생에 영향을 줄 수 있는 상.하수도 누수여부 조사 - 구청 및 수도사업소

❍ 도로포장연구센터 굴착전 소형 GPR 탐사 실시 요청 - 품질시험소

원인조사 방법

❍ 굴착시 외부전문가(도로관리과) 입회하여 원인조사 의견 수렴

❍ 도로포장연구센터 GPR 탐사 등 장비분석에 의한 의견 수렴

❍ 기타 상,하수도 등 누수여부 파악하여 종합적 원인분석(자체) 실시

긴급복구

❍ 대    상 : A, B 등급 2개소(포스코빌딩, 동부금융센터 앞)

❍ 굴 착 일 : 2015. 1~2월중(영상기온 상승시)

❍ 굴착 및 조사방법

- 교통 및 동절기임을 고려 굴착규모 최소화(동공크기) 굴착

- 공동위치 원인조사 확인 후 임시 또는 항구복구 실시

※ 굴착시까지 주 2회 이상 순찰강화 실시(기동반 및 노선담당)

- 굴착공사는 「관내포장도로굴착복구공사(연간단가)」업체 시행

❍ 굴착시 준비사항

- 외부전문가(도로관리과) 및 도로포장연구센터(품질시험소) 입회요청

- 구청 및 유관기관(상.하수도, 통신,가스,전기) 현장 입회 요청

- 작업준비(연간단가 업체)

･ 인  력 : 굴착 및 포장인력 확보

･ 장  비 : 백호, 소형브레이커, 덤프, 바브켓, 로울러, 램머 등

･ 자  재 : 보조(혼합)기층, 아스팔트유제, 아스콘

- 교통안전 : 라바콘, 싸인보도카, 교통신호수 등

지속관찰 실시

❍ 대  상 : C 등급 2개소(강남역 앞, 역삼동 아이파크@입구)

❍ 관찰 및 복구계획

- 동공의 규모상 안전율이 높으므로 지속적 순찰(주 1회) 시행

- 동공 “관리대장” 작성하여 점검사항 기록관리

- 향후 해빙시 굴착(원인조사) 및 복구시행

Ⅲ	향후계획(사후조치)

A,B등급 임시(항구)복구 후 변화상태 지속적(순찰 및 GPR 탐사 등) 관찰

A,B등급 도로포장연구센터 및 외부전문가 조사.분석 의견에 따라 원인분석 등 검토후 임시 또는 항구복구 조치

C등급은 지속적 관찰점검 후 해빙시 도로굴착(원인조사) 및 복구조치

Ⅳ	행정사항

도로굴착에 따른 관할구청 및 지하매설물 유관기관 입회 공문시행

→ 강남구청(도로과), ㈜KT, SK브로드밴드, LGU+, 한전 강남지사,

강남수도사업소(시설과)

도로포장연구센터에 GPR 탐사요청 (A,B등급 우선시행)

도로굴착에 따른 교통통제 협조 요청 → 강남경찰서 교통과

동공 주변 상.하수도 시설 누수여부 사전조사 요청

→ 강남구청(치수과) 및 강남수도사업소(시설과)

붙임 : 1) 동공위치별 세부조사표 1부.

2) 동공주변 지장물현황도 및 현장로도뷰 전경사진 각 1부.

3) 동공 관리대장 1부.  끝.