문서번호	시설과-104
결재일자	2015.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설과장
양지윤		홍순철	01/14 진병규
협조

『보라매공원 농촌체험장 정비공사』

준공기한 연기 검토 보고

2015.  1.

동부공원녹지사업소

시   설   과

『보라매공원 농촌체험장 정비공사』

준공기한 연기 검토 보고

우리사업소에서 추진 중인 『보라매공원 농촌체험장 정비공사』와 관련 하여 시공품질 향상을 위해 아래와 같이 준공기한 연기를 시행하고자  검토 보고 드림.

Ⅰ		공 사 개 요

❍ 위    치 : 보라매공원내 농촌체험장

❍ 공사기간 : 2014.12.29. ~ 2015. 1.26

❍ 도 급 비 : 45,426,900원

❍ 도 급 사 : ㈜다우조경 대표 김규정

❍ 공사내용

▸ 농기구 전시구조물 설치

▸ 아궁이, 굴뚝, 장독대 설치 등

Ⅱ		검 토 내 용

❍ 연기사유

▸ 농촌체험장 사업 시행 부지에 얼음썰매장이 운영 중에 있어 공원이용객이 많은 시기에 부지정리 등 공사 마무리가 어려우므로 얼음썰매장 운영 종료 후 마무리 공정을 시행하여 공사품질 확보

❍ 준공기한 변경

구 분	공 사 기 간	비 고
당 초	2014.12.26 ~ 2015. 1.26
변 경	2014.12.26 ~ 2015. 2.15	20일 연장

❍ 지체상금 부과 검토

▸ 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

▸ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅲ		처 리 의 견

❍ 시공사로부터 제출된 준공기한 연기사유가 타당하다고 판단되므로 계약부서에 준공기한 연기 요청하고자 함.

붙임 : 준공기한 연기 요청 공문 1부.(시공사)