문서번호	공간정보담당관-420
결재일자	2015.1.14.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관	공간정보개발팀장	공간정보담당관	정보기획관
양규석	김태준	조봉연	01/14 김경서

서울 정책지도 서비스 구축 사업

준    공    보    고

2015. 1.

정 보 기 획 관

(공간정보담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 ■ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

서울 정책지도 서비스 구축 사업

준    공   보    고

서울 정책지도 서비스 구축 사업에 대한 준공검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		사 업 개 요

▢ 사 업 명 : 서울 정책지도 서비스 구축

▢ 사업기간 : 2014. 4.15 ~ 12.31

▢ 계약금액 : 377백만원

▢ 용역업체 : ㈜지노시스템․중앙항업㈜ 컨소시엄

▢ 주요내용

○ 서울 정책지도 서비스 대상 발굴 및 분석모델 구현

○ 서울 정책지도 데이터베이스 구축

○ 서울 정책지도 운영프로그램 개발

○ 서울 정책지도 서비스용 소프트웨어 도입

▢ 추진경과

○ 계약체결 및 사업착수	: 2014. 4.15

○ 착수보고회 개최	: 2014. 4.22

○ 선행과제(10분동네 프로젝트) 완료	: 2014. 7. 1

○ 서울 정책지도 및 선행과제 언론보도	: 2014. 7.28

○ 자문회의 개최	: 2014. 8.14

○ 중간보고회 개최	: 2014.11.27

○ 수도계량기 동파 정책지도 언론보도	: 2014.12. 2

○ 완료보고회 개최	: 2014.12.22

Ⅱ		준 공 검 사

▢ 검사개요

○ 검 사 자 : 공간정보개발팀장, (임)전산7급 이용익

○ 검사기간 : 2015. 1. 2(금) ~ 1. 9(금)

○ 검사방법 : 성과품 및 응용프로그램 검사

▢ 과업내용 및 검사결과

과 업 내 용		검사결과	비고
서울 정책지도 서비스 대상발굴 및 분석모델 구현	지도에 표출할 수 있는 서울의 사회, 경제, 문화적 현상과 주요정책을 발굴하고 주제별 정책지도에 포함되는 구성요소를 도출	4개 정책목표, 15개 주제, 217개 주제도 발굴·도출	적정
	선정된 정책지도 주제별로 지도로 가시화하기 위한 분석모델을 수립하여 정책지도 제작 시나리오를 작성	15개 주제별 시나리오 작성	적정
	주제 선정은 실무부서 의견, 서울백서, 시정운영계획, 다산콜센터, 서울스마트불편신고 등을 반영하여 시의성 있는 분석주제 선정	실무부서 의견 :자전거 주행경로 등 6개 주제 서울백서 :여성안심택배 등 7개 주제 다산콜센터 :계량기 동파 제로화 등 2개 주제	적정
	정책지도 대상 선정 및 분석모델을 수립하기 위하여 관련분야 전문가를 참여시키고, 전문가의 의견을 반영하여 정책지도 제작의 객관성 및 보편성을 확보	자문회의 개최 :2014. 8.14 용역업체 전문가 참여 :최진무 교수 외 3명	적정

과 업 내 용		검사결과	비고
서울 정책지도 데이터베이스 구축	서울 정책지도 제작을 위해 관련부서에서 보유하고 있는 자료를 수집하고, 수집된 자료를 분류 정책하여 기초자료로 구축	인구자료 등 99개 기초자료 수집	적정
	수집된 자료는 향후 지속적인 갱신을 위하여 해당부서와 협의하여 수집될 자료의 항목이나 자료형식을 표준화	적정 갱신주기 및 항목 선정	적정
서울 정책지도 데이터베이스 구축	수집된 기초자료가 정책지도 제작을 위해 2차 분류, 가공되어야 할 경우에는 원시 자료 및 분류, 가공된 자료 모두 데이터베이스에 저장되어 관리	원시자료 및 가공자료 데이터베이스 저장 관리	적정
	수집된 자료를 데이터베이스에 저장하고 체계적으로 관리하기 위해서 모든 수집자료는 관리에 필요한 정보를 메타데이터로 정의하고, 메타데이터 정보가 데이터베이스에 등록	서울 정책지도 관리 프로그램에서 운영관리	적정
	수집자료가 정보시스템 연계를 통해서 획득될 경우에는 자료수집 및 갱신을 위한 관리프로그램을 제공하여 수집이력이 확인	서울 정책지도 관리 프로그램에서 이력관리 (현재는 오프라인 연계)	적정
	수집자료가 공개가능한 자료일 경우에는 해당 부서와 협의 후 열린데이터광장에 제공할 수 있도록 협조	준공후 열린데이터광장에 제공 예정	적정
	수집된 자료는 분석모델에 기초하여 분석시나리오 단계별로 분석지도로 생성하고, 생성된 분석지도는 데이터베이스 상에 등록·관리	분석지도 데이터베이스에 저장관리	적정
	수집자료의 내용 중 개인정보가 포함되어 있을 경우에는 개인정보를 삭제하고 일체의 개인정보가 유출되지 않도록 함	데이터베이스에 저장된 개인정보 없음	적정
	구축된 모든 정책지도 관련 자료는 목록화하여 관리하고, 수집·분류·정제·가공·분석된 내역을 정리하여 성과품으로 제출	개발완료보고서, 응용서비스 개발보고서, 운영자 지침서, 서비스 사용자 매뉴얼, 프로그램 소스, 실행파일, 정책지도 DB 제출	적정
서울 정책지도 서비스 응용프로그램 개발	응용프로그램 개발 시 유관시스템과 연계 및 정보공유체계를 구축하고, 타 시스템 장애로 인한 업무중단 방지 등을 고려하여 개발	연계 및 정보공유체계 없음(오프라인 연계)	적정
	정책지도 수요부서 및 정책결정그룹, 일반시민들이 정책지도 정보를 손쉽게 열람하고, 정책결정 및 정책홍보를 위한 객관적 자료로 활용할 수 있도록 개발	서울 정책지도 갤러리 웹 및 모바일 웹 개발	적정

과 업 내 용		검사결과	비고
서울 정책지도 서비스 응용프로그램 개발	서울 정책지도는 모바일 장비 및 PC에서 조회할 수 있는 유·무선 통합서비스를 제공	서울 정책지도 갤러리 웹 및 모바일 웹 개발	적정
	주제별 서울 정책지도의 주제별 스토리텔링 내용도 조회할 수 있도록 개발	서울 정책지도 갤러리 웹 및 모바일 웹에서 조회 가능	적정
	시스템 구축 시 검토되어야 하는 관련 규정 및 표준안 등을 준수하고 특별한 규정이나 표준이 없는 경우 서울특별시와 협의하여 추진	서울특별시 웹 개발 표준 프레임워크, 프로젝트관리방법론, 웹 스타일 가이드, 유지보수개발방법론, 웹기반 응용시스템 개발 보안가이드 준수	적정
	소프트웨어품질보증기준을 준수하고, 적합한 개발방법론과 도구를 사용하여 체계적이고 구체적인 업무조사/분석을 실시하며, 그 결과를 서울특별시에 보고·협의	서울특별시 웹 개발 표준 프레임워크, 프로젝트관리방법론 준수	적정
	향후 정책지도 서비스체계의 지속적인 확대 구축시 데이터 모델 및 기능 모델의 적용에 대한 요구를 수용할 수 있도록 개발	서울 정책지도 관리 프로그램 개발	적정
	응용시스템은 개발을 위한 업무 분석 시 변경될 수 있으며, 이 경우에는 서울특별시와 용역수행자가 상호 협의하여 조정	-	적정
	서비스 구현 단위별 순차적 배포 서비스하여 사전 사용자 불편 사항을 모니터링후 보완하여 준공 전 시스템 품질 최적화	선행과제(10분동네 프로젝트) 및 수도계량기 동파 정책지도 서비스 운영	적정
	시설물 반경 검색 및 조회	서울 정책지도 갤러리 위치도에서 검색 가능	적정
서울 정책지도 서비스용 소프트웨어 도입	GIS엔진 1식 -라이선스:4core -서울 정책지도 제작을 위한 분석기능 지원 -기 운영중인 공간데이터웨어하우스와 연계 운영 가능한 제품 -.net, JAVA 기반의 개발 플랫폼 지원 -표준 웹기반 기술을 수용하며 ActiveX의 설치없이 GIS서비스 제공 -다양한 지도데이터 서비스 -2D, 3D, WMS, WFS, KML 서비스 -웹서비스 간의 상호운영성을 위한 기반 기술 제공 -상용 DBMS와 통합, 분산 운영체계 지원	납품 및 설치완료 ※따로붙임 3) 참조	적정
	JEUS 1식 : 4core라이선스	납품 및 설치완료 ※따로붙임 3) 참조	적정
	WebtoBe 1식 : 4core라이선스	납품 및 설치완료 ※따로붙임 3) 참조	적정

▢ 최종성과품 목록

성 과 품	세 부 내 용
개발완료 보고서	- 요약보고서 - 사업전반에 대한 완료보고서
응용서비스 개발보고서	- 요구사항 분석서 - 분석․설계서(DB분야 포함) - 시스템 시험계획서 - 시스템 시험결과서 - 기타 산출물 및 수집자료
운영자 지침서	- 서비스 운영에 관한 사항
서비스 사용자 매뉴얼	- 응용 서비스에 관한 사용자 지침서 ∙PDF파일로 제작하여 시스템에 올려 사용자들이 다운로드 받을수 있도록 한다.
프로그램 소스,실행파일	- 개발된 모든 응용프로그램 소스
	- 프로그램 설치 CD(필요 시)
정책지도 DB	- 구축된 DB 파일 및 파일내역 목록

※ 따로붙임 1), 2) 참조

Ⅲ		행 정 사 항

▢ 서울 정책지도 갤러리 웹 및 모바일웹 운영

○ 내·외부망 연계에 따른 보안성 검사와 내부 직원들을 대상으로 시범운영 완료후 대시민 공개

○ 공개일자 : 2014. 1. 26(월) 예정

▢ 서울 정책지도 대시민 홍보

○ 서울 정책지도를 오프라인에서도 편리하게 볼 수 있도록 디지털 책자형태(e-Book)로 제작하여 배포

○ 서울 정책지도 갤러리 대시민 공개에 따른 보도자료 제공 및 옥외전광판 홍보영상 노출

붙임 : 1) 개발완료 보고서 1부.

2) 서울 정책지도 서비스 구축 용역 최종성과품 1부.

3) 소프트웨어 사용 인증서 2부.  끝.