문서번호	토목부-902
결재일자	2015.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
김동현		이동훈	01/15 노우성
협조

강관비계다리설치 외 1건 조치내용 보고

- 천호대로(광나루역)확장공사 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1.

도시기반시설본부

(토 목 부)

강관비계다리설치 외 1건 조치내용 보고

- 천호대로(광나루역)확장공사 -

지하차도 구조물(U-TYPE, BOX형)의 품질 관리 및 작업자 안전을 위해서는 강관비계다리 및 작업발판 설치가 필요하며, 설계에 누락된 지하차도 구간의 신축이음부 합판거푸집 등에 대한 조치내용 보고임

※ 관련근거 : 천호수 제2014-818호(‘14. 12. 30.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 천호대로(광나루역)확장공사

○ 공사규모 : 폭 6차로 → 10차로 연장 900m(지하차도 580m 포함)

○ 도 급 비 : 45,446백만원

○ 공사기간 : ′10.10.12. ~ ′15.12.31.

○ 시 공 사 : ㈜해동건설외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜수성엔지니어링

□ 감리단 보고내용

○ 강관비계다리 및 작업발판은 “산업안전보건기준에 관한 규칙 제56조 및 한국산업안전공단, 고용노동부 등 관련법규, 지침에 의거하여 고소작업 시 근로자의 안전사고를 미연에 방지토록 강관비계다리 및 작업발판 설치를 규정함에 따라 공사장 안전관리를 위하여 설계에 누락된 강관비계다리 및 작업발판을 설계 반영 적용하는 것이 적정할 것으로 판단되며,

○ 지하차도 구조물공사 중 수량산출서의 수량누락 공종인 신축이음부 합판거푸집(4회)을 설계 반영 적용함이 바람직할 것으로 판단됨

○ 주요 검토내용

구  분

검 토 내용

신축이음부 합판거푸집(4회)

○지하차도 파형강판구간의 신축이음부 마무리면 마감 합판거푸집(4회)누락

강관비계다리

및

작업발판

○물량내역서에 강관비계다리 및 작업발판 수량 누락

○강관비계다리 설계기준

구 분	내 용
수량산출서	•강관비계다리 품목명기(수량 누락)
시방서	•[6-7 비계 및 안전시설(작업발판)] 자재, 시공방법 등 상세 표기됨
관련법규	•[산업안전보건기준에 관한 규칙] 제56조(작업발판의 구조)에서 작업발판 설치의무 규정함
관련지침	•[강관비계설치 사용안전지침, 한국산업안전공단] •[가설공사표준안전 작업지침, 고용노동부] •[작업발판설치 및 사용안전지침, 한국산업안전공단]
표준품셈	•[2-6-1 강관비계] “...비계다리, 작업대시설 등은 별도 계상할수 있다”라고 명기됨
실적공사비	•[AA31* 강관비계]-[AA310.01100 강관비계다리] 품목 별도산출, 강관비계는 비계발판 비용 제외
질의회신	•강관비계 작업발판 적용가능여부 ⇒ 작업발판 설치가 필요할 경우에는 별도 계상

○ 합판거푸집 누락 부 단면도

	지하차도구간 신축이음부 마감면(1면) 합판거푸집(4회) 누락 추가 반영

○ 강관비계 및 작업발판 설치 전경

	강관비계다리

	작업발판

○ 공사량 증·감 대비표

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증 · △감	비 고
· 구조물공
합판거푸집(4회)	0 ～ 7m	m3	5,487	6,139	652
강관비계	3개월이하	m2	18,137	18,325	188
강관비계다리	3개월이하	m	-	1,230	1,230
작업발판		m	-	7,955	7,955

○ 단가적용 현황

- 작업발판     : 설계가×낙찰율(72.704%)적용

- 강관비계다리 : 실적단가×100%적용

○ 공사비 증·감 대비표

(금액단위 : 천원)

공 종	당 초	변 경	증 · △감	비 고
· 구조물공
합판거푸집(4회)	95,354	106,788	11,434
강관비계	172,944	174,736	1,792
강관비계다리		37,674	37,674
작업발판		57,825	57,825
직접공사비	268,298	377,023	108,725
간접공사비	136,802	187,577	50,775
도 급 액	405,100	564,600	159,500
관급자재비
공 사 비 계	405,100	564,600	159,500

□ 조치계획

○ 감리단에서 제출한 실정보고 검토의견이 적정하므로 승인 조치하고

○ 향후 본부 설계변경자문위원회(소위원회)를 거쳐 설계변경 반영코자 함

붙  임 : 감리단 검토보고서 1부.  끝.