문서번호	교통운영과-847
결재일자	2015.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	중앙차로팀장	교통운영과장
이민호	김종호	01/15 강진동

중앙버스전용차로 기능개선 설계용역 준공기한 연기 보고

2015. 1

도시교통본부

(교통운영과)

중앙버스전용차로 기능개선

설계용역 준공기한 연기 보고

대중교통 이용 편의 및 중앙버스전용차로 흐름개선을 위하여 ‘14년에 추진한 “중앙버스전용차로 기능개선 설계용역”의 성공적인 마무리를 위하여 준공기한을 연기하고자 함

		과업개요

□ 사 업 명 : 중앙버스전용차로 기능개선 설계 용역

□ 계약금액 : 53,086천원

□ 계 약 자 : ㈜ 천일  대표 김석환

□ 계약기간 : ‘14. 6. 24 ~ ’15. 1. 19

□ 과업대상 : 경인로 등 8개노선 12개소

□ 과업내용 : “붙임 1” 참조

		추진현황

□ ‘14. 9.26 : 사업여건 변화에 따른 과업대상 변경

○ 한강대교 노들섬 활용계획(공공개발센터) 등 사업여건 변경으로 용역 수행이 불가한 과업대상을 제외하고 민원발생 지점으로 변경

- 한강로 및 망우로 등 6개노선 9개소 → 경인로 등 7개노선 10개소

□ ‘14.12.11 : 과업대상 추가(통일로 독립문 교차로)

○ 통일로 독립문 교차로에 대한 지역주민들의 보행 및 대중교통 이용환경 개선에 대한 요구가 커짐에 따라 그 영향권에 대한 지점별 교통량 조사 등을 과업대상에 추가

□ ‘14.12.15 : 과업대상 추가(망우로 동부시장 앞)

○ 중랑구청에서 추진하고 있는 중랑역 하부 개선공사와 연계하여 망우로 동부시장 앞에 교통체계 개선(교차로 신설) 요구가 있어 교통체계 등을 조사를 과업대상에 추가

		보고내용

□ 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간	‘14.6.24~’15.1.19	‘14.6.24~’15.2.28	40일 연장
계약금액	53,086백만원	53,086백만원	변경없음

□ 귀책소재 : 서울특별시

□ 지체상금 : 미부과

□ 연기사유

○ 한강대교 노들섬 활용계획(공공개발센터) 등 사업여건 변화에 따라 불가피하게 과업대상이 변경되어 절대공기 부족

- 교통운영과-17925(‘14.9.26) 중앙버스전용차로 기능개선 설계용역 과업대상 변경

○ 현장조사 및 교통체계 검토가 시급한 민원발생 구간에 대한 과업대상 추가에 따른 절대공기 부족

- 교통운영과-23423(‘14.12.11) 통일로 독립문 교차로 주변 교통운영체계 변경민원 검토

- 교통운영과-23547(‘14.12.15) 중랑역 하부 개선공사 관련 동부시장 앞 교차로 신설 민원 검토

		향후계획

○ 2015. 2 : 용역 검수 및 준공

붙임 : 1. 중앙버스전용차로 기능개선 설계변경 과업내용 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

[붙임 1]

중앙버스전용차로 기능개선 설계용역 과업대상

6개노선 9개소 → 8개노선 12개소

연번	당 초	변 경	비고
1	한강로 한강대교		제 외
2	망우로 삼육서울병원 앞		제 외
3	공항로 등촌역 앞		제 외
4	미아로 길음2동주민센터 앞		제 외
5	경인로 개방사거리	경인로 개방사거리	변경없음
6	천호대로 군자역 앞	천호대로 군자역 앞	변경없음
7	천호대로 한신휴플러스삼거리	천호대로 한신휴플러스삼거리	변경없음
8	공항로 송정역 앞	공항로 송정역 앞	변경없음
9	경인로 신도림역 앞	경인로 신도림역 앞	변경없음
10		왕산로 청량리역 버스환승센터	추 가
11		통일로 녹번역 앞	추 가
12		삼일로 명동성당 앞	추 가
13		천호대로 아차산역사거리	추 가
14		신반포로 고속버스터미널 앞	추 가
15		통일로 독립문 교차로	추 가
16		망우로 동부시장 앞	추 가

[붙임 2]

준공기한 연기 의뢰서

1. 계약내용

가. 사 업 명 : 중앙버스전용차로 기능개선 설계 용역

나. 계약금액 : 53,086천원

다. 계 약 자 : ㈜ 천일 대표 김석환

라. 계약일자 : ‘14. 6. 23.

마. 착공일자 : ‘14. 6. 24.

바. 준공기한 : ‘15. 1. 19.

2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : ‘15. 2. 28.

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

다. 지체상금 : 미부과

라. 연기사유

○ 한강대교 노들섬 활용계획(공공개발센터) 등 사업여건 변화에 따라 불가피하게 과업대상이 변경되고, 현장조사 및 교통체계 검토가 시급한 민원발생 구간에 대한 과업대상 추가에 따라 절대공기 부족

- 당초 6개노선 9개소 → 변경 8개노선 12개소

○ 중앙버스전용차로 기능개선 설계 용역의 과업내용 변경 및 추가 등으로 다소 지연되어 본 사업의 원활한 과업수행과 완성도를 제고하고자 준공기한 연장이 불가피 함

2015년 1월  일

교통운영과장  강 진 동(인)

서울특별시(분임)경리관 귀하