문서번호	총무과-1717
결재일자	2015.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	시설관리팀장	총무과장
채충일	최석기	01/16 이혜경

공기청정기 임차계약 변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1.

행  정  국

(총무과)

공기청정기 임차계약 변경 검토보고

임차 사용 중인 공기청정기의 계약기한을 회계 출납 폐쇄일에

맞추어 변경코자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 신청사 공기청정기 임차

○ 용역기간 : ‘14.4.9~’15.3.31

○ 계약금액 : 금64,584,000원(금육천사백오십팔만사천원)

○ 계약업체 : 보성전자(주),  백정현

□ 변경내용

○ 변경사유 및 조치

- 재무과에서 공기청정기 임차용역 계약기한인 ‘15.3.31이 회계연도 독립의 원칙에 위반됨을 지적

※ 변경전 : 임차료가 매달 선불로 지급되어 회계연도 출납 폐쇄기한내              비용은 지출되나, 계약기한은 출납 폐쇄일 초과

- 임차용역 계약기한을 회계연도 출납 폐쇄기한인 ‘15.2.28로 변경

- 임차기간이 1달 축소됨에 따라 1개월분 임차료 감액

○ 변경내역

구분	당초	변경	증감	비고
용역기간	‘14.4.9~’15.3.31	‘14.4.9~’15.2.28	감) 1개월
용역금액	64,584,000원	57,683,000원	감) 6,901,000원

- 예산과목 : 행정지원체계강화, 청사관리, 시청사및영조물관리, 사무관리비

□ 조치의견

○ 상기와 같이 계약변경 시행 후 준공정산을 시행코자 함.

붙임  1. 임차료 변경내역서  1부.

2. 합의각서  1부. 끝.