과 장		01/16 국중진		팀 장	홍수종		심사자	하승환		설계자	최영서	설 계		심 사		결 재
												2015년 1월		2015년 1월
설 계 서(3차 변경)
	용역명 : 2014년 폐아스콘 운반 및 처리용역(연간단가)-1구역
	구 분					금 액									비 고
						당 초			변 경				증 ․ 감
	총 공 사 비					327,393,000			316,976,000				감 10,417,000
	도급비		공 급 가 액			297,630,000			288,160,000				감 9,470,000
			부 가 가 치 세			29,763,000			28,816,000				감 947,000
			계			327,393,000			316,976,000				감 10,417,000
□ 용역개요 ○ 폐아스콘 운반 및 처리 당초 28,650톤 -----> 변경 28,215톤 ○ 폐콘크리트 운반 및 처리 당초 900톤 -----> 변경 670톤